문서번호	정보시스템담당관-10447
결재일자	2017.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
이운심		이영순	09/04 이기완
협조

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간(월간)업무 현황보고(8월 4~5주차)

2017. 8.

정보시스템담당관

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간(월간)업무 현황보고(8월 4~5주차)

사업개요

❍ 사 업 명 : 행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

❍ 사업기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 12. 1.

❍ 계 약 자 : (주)시도우

❍ 사업금액 : 금113,000천원

주간 보고 내용

❍ 추진기간 : 2017. 8. 18. ~ 2017. 8. 31.

❍ 진 척 율

단계	계획	실적
전체	51%	33%
사업관리(착수)	100%	100%
분석	100%	28%
설계	100%	42%
구현	30%	0%
테스트	19%	0%
운영이관	0%	0%

❍ 추진실적

- 프로토타입 구축 및 중간보고 자료 작성

- 프로토타입 검증 작업

❍ 향후계획

- 중간보고회 개최(9.1)

- 시스템 구현

❍ 인력교체

- PM 부재에 따른 기존 PM으로 인력 변경

*********************************************

*********************************

❍ 담당자 의견

- 현재 18% 일정이 지연되어 있으며 시스템 구현시 일정 만회를 위하여 추가 개발자 2명 투입 예정

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 2부.

2. 회의록 2부.

3. WBS 1부.

4. 월간(8월)업무 현황 보고서 1부.  끝.