문서번호	도로보수과-4987
결재일자	2017.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
조재민		김준섭	09/04 이덕기
협 조
	주무관			한수영

노들로 방음벽 설치공사 타당성조사 및 실시설계용역

설계변경 검토 보고(최종)

2017. 09

남부도로사업소

도로보수과

노들로 방음벽 설치공사 타당성 조사 및 실시설계용역

설계변경 검토 보고

노들로 방음벽 설치공사 타당성 조사 및 실시설계용역 설계변경에 대하여 검토후 결과를 보고드림.

Ⅰ		용역개요

용역명 : 노들로 방음벽 설치공사 타당성 조사 및 실시설계용역

위  치 : 영등포구 신길동 16-13 ~ 1-4

규  모 : H=6m, L=275m

용역비 : 50,767천원

용역사 : ㈜케이알티씨 대표 이상진

기  간 : 2017. 03. 28 ~ 09. 08

Ⅱ		보고사항 및 조치계획

방음벽 설치구간내 지반의 공학적 자료 수집과 결과 검토후 경제적인 설계를 하기 위해 지반조사가 필요함.

⇒ 도로보수과-2349(2017.04.24.)호로 기 보고한 내용으로 지반조사를 추가하고 추후 설계변경시 반영

과업구간내 설치된 석축에 대해 추가 안정성 검토 지시

⇒ 도로보수과-3484(2017.06.28.)호로 기 보고한 내용으로 방음벽 기초 설치시 굴착에 대한 방음벽 안정성을 검토(3차원 모델링)을 지시하고 추후 설계변경시 반영

설계변경내역(1차)

구분		당초금액	변경금액	증·감	비고
용역비	공급가액	45,606,636	61,204,314	15,597,678
	부가가치세	4,560,664	6,120,431	1,559,768
	자문회의비	600,000	-	-600,000
	소계	50,767,300	67,320,000	16,552,700

Ⅲ		향후계획

2017. 09. 12 : 1차 설계변경시행

2017. 09. 08 : 용역준공

붙임 : 1. 실정보고서 2부.

2. 설계변경내역서 1부. 끝.