서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
	서울특별시
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사 공기연장 허가 신청

1. 관련근거

○ 재난대응과-4830(2017.3.7.)호 『2017년 소화전 도색·보온 공사계획』

○ 서울시 재무과-18185(2017.4.7.)호 『계약체결 통보』

○ 정석TMS********4(2017.9.5.)호 『공기연장 신청』

2. 2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사와 관련 계약업체의 공기연장 요청에 따라 다음과 같이 공사기한 연장을 하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사(연간단가)

나. 공사업체 : 정석티엠에스주식회사

다. 공사기한 : 2017.04.05. ~ 2017.09.30.

라. 요청사유 : 우천으로 인한 공사 지체

마. 연장일수 : 61일(2017.11.30.일 까지)

바. 검토의견 : 행정안전부 예규 제1호(2017.7.26.) 『지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준』 에 의거 계약 상대자의 책임에 속하지 않는 사유(공기중 우천)로 인하여 지체된 경우에 해당 됨에 따라 공기연장 신청을 허가함이 적합하다고 판단됨.

붙임  1. 공기연장신청서 및 기상현상 증명서 1부.

2. 공기연장 합의각서 1부.  끝.

	재난대응과장
담당자	김민수		대응전략팀장	이창식		재난대응과장	09/05 김학준
협조자
시행	재난대응과-18828	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/	minsu36@seoul.go.kr	/	부분공개(5)