투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	중앙버스전용차로 흐름개선 사업비 추가 배정요청

1. 교통운영과-11574호(2017.6.20.)와 관련입니다.

2. 교통정체 및 시민이용불편 해소를 위해 진행중에 있는 중앙버스전용차로 흐름개선(양동중학교앞 유턴설치) 사업에 대해 아래와 같이 추가 사업비가 필요하여 배정요청하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 사업대상 : 양동중학교앞 유턴 설치

나. 재배정 내역

(단위 : 원)

예산과목			재배정처	누계 배정액	기 배정액	추가 배정 요청액	비 고
부서정책단위	세부사업	통계목
교통운영과 도시교통체계 및 소통개선 버스서비스 이용제고	중앙버스 전용차로 흐름개선	시설비 (401-01)	합 계	134,536,000	60,813,000	73,723,000
			강서도로사업소 도로보수과	134,536,000	60,813,000	73,723,000

다. 추가 사업비 필요사유

- 양동중학교 앞 유턴설치에 따른 야간할증 적용

- 기존 가드레일 재설치 비용 산정

- 가드레일 지주 철거 및 분리경계석 구간 아스팔트 포장 비용 산정

- 중앙차로 분리경계석 설치(콘크리트 타설) 비용 산정

- 노면표시(차선·기호·문자·횡단보도·주정차금지대 등) 비용 산정

- 차선규제봉 설치 비용 산정 등.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	박성근		도로보수과장	전결 09/05 김권일
협조자
시행	도로보수과-9419	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 (마곡동67-1) 강서도로사업소	/
전화	02-2657-7942	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개