문서번호	급수운영과-15907
결재일자	2017.9.6.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
최지영	임인택	09/06 代김용현
협 조

준공기한 연기 보고(신설-79)

명에 의거 풍납동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 공사 현황

- 공 사 명 : 2017년 풍납동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 급수공사 기한 연기 내역

****	****	****	*******	*******	비고
*****	*********	****** ****	*********** *********	*********** ***********

2. 연기 사유 : 신축공사 현장으로 건물 공사 일정 지연하여 수요가(건물주)가 급수공사

일정을 연기 요청함

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

4. 조치내용

- 상기와 같이 수요가의 급수공사일정 연기 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 주호산업개발㈜ ******에게 통보하고자 합니다.

붙임 : 사진대지 1부.  끝.