문서번호	도로보수과-9493
결재일자	2017.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박종찬		김권일	09/06 김용제
협조
	주무관		이옥휘

『2017년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사』

설계변경 검토보고(제2회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

강서도로사업소

(도로보수과)

『2017년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사』

설계변경 검토보고(제2회)

2017년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사 중 민원, 포장도로 정비공사 등으로 물량 증·감사항이 발생되어 검토하고 보고함.

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 2017년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사

□ 사업기간 : 2017.3.17.~12.15.

□ 규    모 : 맨홀보수 492개소(주간 153개소, 야간 339개소)

□ 도 급 비 : 431백만원

□ 도급업체 : 태평림건설(주) 대표 이동균

Ⅱ		설계변경 검토

□ 변경사유

○ 불량맨홀 정비공사 중 민원, 포장도로 정비공사 등으로 맨홀종류별 물량변경(증·감) 발생

□ 변경내용

○ 금액변경 : 변경없음

구 분		변경계획(원)			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
도 급 비	공급가액	391,759,091	391,759,091	-
	부 가 세	39,175,909	39,175,909	-
	도 급 비	430,935,000	430,935,000	-

- 세부 금액변경 내역 : 붙임 설계변경 내역서 참조

○ 물량변경

공 종	규 격		변경계획(개소)			비 고
			당 초	변 경	증 · 감
불량맨홀 정비	Φ 648, Φ 766 등	소 계	498	492	감)6
		주 간	254	153	감)101
		야 간	244	339	증)95

- 세부 물량변경 내역 : 붙임 설계변경 내역서 참조

○ 기간변경 : 변경없음

Ⅲ		조치계획

○ 상기와 같이 설계변경하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

○ 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 부속시설물관리(도개특), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1) 2017년 맨홀관리 계획 1부.

2) 설계변경 내역서(2회) 1부.  끝.