서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
		서울특별시
수신	서울시복지재단 대표이사
(경유)
제목	2017년 종합사회복지관 기능보강사업 변경신청 타당성검토 의뢰

1. 동작구 복지정책과-6992호(2016.04.11)호와 관련입니다.

2. 2017년 종합사회복지관 기능보강사업과 관련하여 변경 신청이 있어 타당성 검토 의뢰하오니 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시설 : 동작종합사회복지관

나. 사 업 명 : 화장실 환경개선

다. 변경내역                                           (단위:천원)

복지관명	사업내역	기 존		변 경(안)		증감
		예 산	내용	예 산	내용
동작종합 사회복지관	화장실 환경개선	13,940	복지관남녀화장실 중앙분리 벽면 방음 및 천정 시공 -남녀화장실중앙벽면 하부에 조적 쌓고, 75MM 판넬, 석고보드, 타일 시공 -천정 : 리빙보드,큐비클 교체	18,560	-기존 남녀화장실 중앙분리벽면 및 천정공사에 따른 자재변경 -기존 공사 외 추가공사 ·1층 장애인 화장실 변경 ·응급벨 설치 (8곳) ·화장실 환경개선 공사 라디에이터그릴박스(7곳) 비트점검구 보수(3곳) 소변기 파티션 설치(2곳)	△4,620 (증가분 - 자부담 예정)

라. 변경사유

- 화장실 방음 자재 교체를 통한 방음자재 교체를 통한 방음효과를 증가 및 시공일 단축으로 이용자의 불편감소

- 장애인화장실 설치를 통한 장애인 및 노약자의 편의 증진 도모

- 응급벨 설치를 통한 위험과 응급상황에 대한 신속한 대처로 안전성 향상 도모

붙 임 : 변경신청 관련 서류 각1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							김지경			복지시설지원팀장					오은미					복지정책과장					09/04 정환중
협조자
시행			복지정책과-17938									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 4층															/
전화		02-2133-7337						/전송			02-2133-0718					/													/	대시민공개