문서번호	도로계획과-12823
결재일자	2017.9.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장		안전총괄관
강전남	한정무	하종현		09/06 이진용
협 조
	예산3팀장		강인철

율곡로(창경궁앞) 도로구조개선공사

예산변경 및 집행계획

2017. 9.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- 율곡로(창경궁앞) 도로구조개선공사 -

예산 변경 및 집행 계획

도심지에서 시행하는 공사의 특성상 시공중 발생하는 각종 지장물로 인해 작업기간 지연, 야간작업 등으로 감리투입 기간에 따른 추가 감리비(50백만원) 확보를 위한 예산변경 지급을 위한 예산변경(시설비 → 감리비) 보고임.

□ 사업개요

○ 사 업 명: 율곡로(창경궁앞) 도로구조개선공사

○ 위    치: 종로구 창덕궁 교차로 ~ 원남동 사거리

○ 규    모: 도로확장 폭 4→6차로, 연장 800m(지하차도 320m)

○ 사업기간: 2010.10 ~ 2017.12(`19.12월 연기 예정)

○ 감 리 사: ㈜한국해외기술공사외 1

○ 총사업비: 85,370백만원

○ 위 치 도

□ 주요 추진현황

○ `09.02.~`10.05.: 기본 및 실시설계 시행(용역사: 동명기술공사 외1)

○ `10.08.: 도시계획시설사업 실시계획인가

○ `10.10.: 공사 계약 및 착수

○ `17.08월 현재: 교통처리대책 5단계 추진 중

□ 연차별 투자현황

(단위: 백만 원)

구분		총사업비	기투자	2016	2017	2018이후
계		85,370	46,454	2,000	5,300	31,616
시설비	설계비	970	970	-	-	-
	보상비	32,987	22,111	-	-	10,876
	공사비	47,863	21,623	1,700	4,800	19,740
감리비		3,550	1,750	300	500	1,000

□ 예산변경 사유

○ 감리원 기간 연장

- 상수도 부설을 위하 터파기 작업중 일부 구간에 암반 발생으로 공사기간 연장에 따른 용접감리원 투입 기간 연장(약1개월)

- 지하차도 시공에 소요되는 PC제작업체가 타시도(경북)에 있고, 공기 단축 및 현황 여건상 야간작업을 시행함에 따라 토목감리원 투입기간 연장(약2개월)

○ 물가변경분 반영

- 물가 변경(3.69%) 반영에 따른 설계변경

□ 소요(예상) 비용

○ 소요비용: 50,000,000원

구 분	당 초	변 경	증·△감
감리투입연장(용접)	15,500천원	24,200천원	8,700천원
감리투입연장(토목)	63,700천원	85,000천원	21,300천원
물가변동(E/S)	70,000천원	90,000천원	20,000천원
합 계	149,200천원	199,200천원	50,000천원

□ 조치계획

○ 율곡로(창경궁앞) 도로구조개선공사의 차질없는 사업추진을 위하여 금년도 시설비 예산 중 일부(50백만원)을 통계목 조정(시설비→감리비)하여 감리비로 집행토록 예산 조정

- 예산변경 내역

(단위: 백만 원)

예 산 과 목						예 산			변경액		변경후 예산액
정책	단위	세부	편성목	통계목		현액	이월예산	본예산	증	감
도로 건설	간선도로망확충 (도시개발특별)	율곡로(창경궁앞) 구조개선	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	보상	-	-	-	-	-	-
					공사	7,988	3,188	4,800	-	50	7,938
				감리비 (401-02)		550	50	500	50	-	600

붙 임: 1. 사업비 변경 검토보고(도기본 토목부-18280, `17.8.31) 1부.

2. 감리비 산출(변경) 내역서 1부.   끝