투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	하도급 변경계약(전기) 알림(중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업)

1. 한종(중랑)감 제17-237호(`17.09.06)와 관련입니다.

2. 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 사업 추진과 관련하여 전기공사 하도급 계약이 변경되어 붙임과 같이 알려드립니다.

가. 하도급(전기) 변경계약 현황

구분	공종	원도급자	하도급 내용				비고
			하도급자	계약기간	원도급액	하도급액
변경전	전기	GS건설(주)	금아기전(주)	`16.08.24 ~ `17.07.31	2,693,314천원	2,754,400천원
변경후	전기	GS건설(주)	금아기전(주)	`16.08.24 ~ `17.08.31	2,693,314천원	3,266,890천원	증)512,490천원 (30일 연장)

※ 변경사유 : 도급외(시설현대화 사업 개선공사) 추가분 계약

따로붙임 : 1. 물품검수 내용 1부.

2. 물품검수조서 각1부.  끝

	설비부장
수신자	건설총괄부장,방재시설부장
주무관	김두환		열빛총괄과장	유병기		설비부장	09/08 권오식
협조자
시행	설비부-15358	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8(무교동 96) 프리미어 플레이스 빌딩 15F 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8611	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	부분공개(7)