문서번호	기전과-6413
결재일자	2017.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		09/08 곽희영
협 조	주무관		이명호
	주무관		김수진

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 변경요청 검토보고(왕십리3구역-2[신호])

2017. 9.

성동도로사업소

(기  전  과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 변경요청 검토보고(왕십리3구역-2[신호])

교통안전시설물 원인자 부담공사(왕십리3구역-2)의 준공기한 변경요청이 접수되어 검토하여 보고드림.

Ⅰ

관 련 근 거

○ 왕뉴3재조 제17-78호(2017.08.)
→ 교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 연장요청

Ⅱ

공 사 개 요

○ 공 사 명 : 교통안전시설물(신호) 원인자부담공사(왕십리3구역-2)

○ 공사위치 : 왕십리뉴타운3구역 주택재개발정비사업 주변

○ 공사기간 : 승인일로부터 ∼ 2017. 07. 31.

○ 원 인 자 : 왕십리뉴타운3구역 주택재개발정비사업조합

○ 시 공 사 : 소명전기

Ⅲ

변 경 내 용

○ 시공사 변경현황

구 분	원인자	감리사	공사기한
			당 초	변 경
교통신호	왕십리뉴타운3구역 주택재개발정비사업조합	㈜트래픽스	승인일로부터 ∼ 2017.07.31.	승인일로부터 ∼ 2017.09.30

○ 변경 및 연기사유

- 교평변경으로 인하여 규제변경 및 시공사 계약·선정에서 발생한 작업공정 지연으로 인한 변경

- 상왕십리역 연동폐쇠에서 연동신설, 입주민 민원으로 인하여 기존 연동 폐쇠공정을 연동 신설 후 철거로 변경

Ⅳ

검 토 결 과

○ 시공사 변경 및 공기연장 사유를 검토한결과 타당하나 준공기한을 초과하여 이를 주의시켜 승인하고자 합니다.

첨  부 : 원인자부담공사 시공사 및 공기연장 변경요청 1부. 끝.