투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능개선 용역 월간보고(8월)

1. ’17년 건설정보시스템 유지관리 및 기능개선 계획(본부장방침 건설총괄부-26474, ’16.12.06)호와 관련입니다.

2.「2017년 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능개선」용역을 추진 중인바, 2017년 7월 실적을 보고합니다.

가. 사업 개요

1) 계약건명 : 2017년 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능개선 용역

2) 계약기간 : 2017. 2. 14 ~ 2017. 12. 31

3) 계약금액 : *********

4) 계약업체 : **********

나. 월간보고

1) 보고내용 : 2017년 8월 실적

2) 공 정 율 : 계획 61.99% / 실적 60.13%

3) 주요사항

구분	추진사항
2017. 7월 추진실적	o 행정모드에 담당사업 관리 화면 구성(완료) - 사업모드에서 확인할수 있는 사업상세정보를 행정모드에서 담당사업 관리 화면을 신규 개발하여 발주처 감독의 사업관리 기능 개선 o 건설정보관리시스템(One-PMIS)내 ActiveX(파일업로드/다운로드) 제거를 위한 기능개선(완료) - 파일다운로드/업로드 기능 ActiveX 제거 후 개발 완료 o 키스콘 6종의 자료처리 방식을 대금e바로시스템 정보연계로 개선(완료) - 자료수신을 위한 연계 스키마 정의 및 확정 - 자료수신을 위한 연계요청, One-PMIS내 축적자료 제공 - 연계대상 : 6종(공사대장, 업체대장, 공사실적, 신기술정보, 업종정보, 수주업체리스트) o 건설 중요기록물(도면 등) DB전산화에 따른 연계(계속) - 기록관리시스템(정보공개정책과)와 연계 테이브 정의를 위한 협의중 o 서울시 내부시스템 정보연계 및 표출(계속) - 디지털시민시장실 송신자료 뷰테이블 정보 분석 - 빅데이터 분석시스템 송신자료(뷰테이블) 추가정보 정의 및 기타 요구사항 협의 o 사토 및 폐기물 스마트 관리시스템과의 정보연계(계속) - 연계시스템 업체와 연계방식 등 협의 o 사용자 매뉴얼 및 교육자료 관리절차 개선(계속) - 사용자 매뉴얼 등록 및 관리 화면 개편을 위한 신규 화면 설계 및 개발 o 기능보완 개발 (기능보완 및 오류 수정) - 자원관리탭 오류 수정 및 기능개선(전일수량 수정시 비고항목 필수입력) - 관리자 메뉴의 개인정보 접근이력 메뉴 개선 - 건설알림이 지도검색서비스 해당위치로 자동이동하도록 개선 - 건설근로자공제회의 전자인력관리제 정보 연계 오류 수정 - 사용자 지원 콜센터 운영, 타시스템 연계지원, 서버 정기점검 등
2017. 9월 추진계획	o 사토 및 폐기물 스마트 관리시스템과의 정보연계(계속) o 건설 중요기록물(도면 등) DB전산화에 따른 연계(계속) o 서울시 내부시스템 정보연계 및 표출(계속) o 사용자 매뉴얼 및 교육자료 관리절차 개선(계속) o 사용자별 동영상 강의자료 구축 및 정보연계(계속) o 건설알림이 웹접근성 심사(계속) o 공정보고 현황 재구성 및 절차개선 o 사업현황 재구성 및 절차개선 o 로그인 화면 변경 o 기능보완 개발 (기능보완 및 오류 수정)

붙임	1. 월별공정보고서	1부.

2. 2017 용역사업 일정표	1부.

3. 유지보수 작업지시 관리대장	1부.

4. 서버정기점검보고서	1부.

5. 보안점검결과서	1부.

6. 출근부	1부.	끝.

주무관	김주형		건설정보관리과장	代최명자		건설총괄부장	09/08 이상국
협조자
시행	건설총괄부-21219	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 11층 건설총괄부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2387	/전송	3708-2327	/	mistletoe@seoul.go.kr	/	부분공개(5)