문서번호	녹지관리과-4384
결재일자	2017.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
김은지		문경재	09/11 문길동
협조

이촌한강공원 어린이놀이터 안전펜스 설치 변경계획

2017.  9.

한강사업본부

(녹지관리과)

이촌한강공원 어린이놀이터 안전펜스 설치 변경계획

우리본부에서 시행예정인 “이촌한강공원 어린이놀이터 안전펜스 설치”와 관련하여 현장여건 반영 등에 따른 계획변경사항을 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진배경

○ `17.9.2. 금호나들목 어린이놀이터 앞 안전사고 발생

- 놀이터와 자전거도로 사이에 사각지대가 있어 자전거주행자와 놀이터에서

갑자기 뛰어나온 어린이와 충돌

- 사각지대에 안전펜스 설치로 위험요소 제거

□ 당초 설치계획

○ 위    치 : 이촌한강공원 금호나들목 어린이놀이터

○ 내    용 : 안전펜스(H500) 23m 설치

○ 소요예산 : 금 2,000,000원

□ 변경사유

○ 현장 여건을 감안하면 기존 설치예정이었던 펜스는 이용빈도가 높은 공원 경계용으로

설치하기에는 패널부분이 약해 유지관리의 어려움이 예상돼, 좀더 튼튼한 디자인으로

교체함이 타당할 것으로 판단됨

○ 재실측 결과 곡선거리 추가로 기존 23m에서 24m로 1m 추가설치

□ 변경 설치계획

○ 내    용 : 안전펜스 23m(H500) 설치 ⇨ 24m(H800) 설치

○ 소요예산 : 2,000천원 ⇨ 4,000천원

□ 향후계획

○ 2017.  9    : 펜스설치 완료

붙  임 : 1. 기존방침서 1부.

2. 제품비교표 1부.  끝.