문서번호	정보시스템담당관-10734
결재일자	2017.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
이운심		이영순	09/11 이기완
협조

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(9월1주차)

2017. 9.

정보시스템담당관

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(9월1주차)

사업개요

❍ 사 업 명 : 행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

❍ 사업기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 12. 1.

❍ 계 약 자 : (주)시도우

❍ 사업금액 : 금113,000천원

주간 보고 내용

❍ 추진기간 : 2017. 9. 1. ~ 2017. 9. 7.

❍ 진 척 율

단계	계획	실적
전체	57%	41%
사업관리(착수)	100%	100%
분석	100%	33%
설계	100%	52%
구현	56%	8%
테스트	36%	0%
운영이관	0%	0%

❍ 추진실적

- 프로토타입 결과에 따른 개발 추진

❍ 향후계획(개발 일정)

- 09.11(월)~20(수) : 기능구현(디자인 변경)

- 09.21(목)~22(금) : 단위테스트

- 09.25(월)~29(금) : 수정 및 보완(종결)

- 10.10(화)~11(수) : 코드최적화 점검 및 작업 수행

- 10.12(목)~13(금) : 단위테스트 및 보완(종결)

❍ 담당자 의견

- 일정 지연 사유 : 기획 및 프로토타입 구축 지연, 산출물 작성 지연

- 일정 만회 방안 : 개발인력 추가 투입

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 1부.

2. 회의록 1부.

3. 작업분할표(WBS) 1부.  끝.