문서번호	도로보수과-9668
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	09/11 김용제
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제6차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제6차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

○ 시공업체 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

○ 도 급 비 : 884,334,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제6차, 추가분)

○ 작업위치 : 강서구 방화동 500-14(개화사거리)주변 외 44개소

○ 작업기간 : 2017. 07. 26. ~ 2017. 09. 15.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	149,164천원	142,600천원	감) 6,564천원
관 급 비	32,675천원	31,858천원	감) 817천원
총 공사비	181,839천원	174,458천원	감) 7,381천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	강서구 양천로 112 (김성태의원 사무실 앞)	70	44	감) 26	차로 밑그림 제외
2	강서구 등촌동 607-8 (등촌중학교 부근)	100	24	감) 76

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
3	강서구 양천로666 증미역(양화교방면 보람더하임1차@103동 앞)	13	13	-	노면표시 제거
4	강서구 공항대로395주변 (강서구청4거리전방40m지점)	105	59	감) 46	차로 밑그림 제외
5	강서구마곡중앙로33주변 (강서면허시험장방면 마곡역교차로전방60m지점)	34	21	감) 13
6	강서구마곡중앙로33주변 (강서면허시험장방면 마곡역교차로-마곡엡벨리14단지1402동앞)	34	21	감) 13
7	구로구도림천로446도림천로구로디지털단지입구	25	17	감) 8
8	양천구신정동871-20오금교북단(양천방향포켓)	297	199	감) 98
9	양천구 홍익병원사거리동측(국회대로276우당아파트앞)	41	25	감) 16
10	영등포구 영등포로91주변 양남사거리동측(오목교방면)	139	86	감) 53
11	영등포구 영등포로66주변 양남사거리서측(영등포로터리방면)	55	34	감) 21
12	영등포구 영등포로112주변 영등포유통상가서측	130	65	감) 65
13	영등포구 국회대로794건너편 국회도서관횡단보도동측(인천방면)	195	130	감) 65
14	영등포구 국회대로746건너편 의원회관동측(인천방면)	155	73	감) 82
15	영등포구국회대로665영동초교횡단보도동측(인천방면)	260	135	감) 125
16	영등포구 국회대로627 코레일사거리동측(인천방면)	175	131	감) 44
17	영등포구 국회대로591 영등포경찰서횡단보도(연동)동측(인천방면)	476	319	감) 157
18	강서구 양천로550가양동 증미역-가양역방면 강서소방소(보) 전방70m (강서소방서 앞)	39	26	감) 13
19	구로구 경인로 31길 (드림아이어린이집 앞)	347	314	감) 33
20	천왕파출소 주변	413	234	감) 179
21	경복 비즈니스 고등학교 주변	45	54	증) 9	현장실측 물량차이
22	강서구청 사거리 주변	564	413	감) 151
23	중앙로 280 신정네거리역 교차로	1,753	1,643	감) 110
24	남부순환로 과학수사연구원 교차로	2,079	2,059	감) 20

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
25	강서구 화곡로 340 (KB국민은행 강서지점 주변)	1,283	1,227	감) 56	현장실측 물량차이
26	영등포구 버드나루로94 신동인오피스텔	66	33	감) 33	차로 밑그림 제외
27	영등포구 국회대로38길 15(한양아파트 앞)	1,204	886	감) 318
28	영등포구 선유서로 6 주변 도림천로 (신도림고가차도 → 신정교방향)	406	340	감) 66
29	강서구 방화동 651-1 (김포공항 교차로 주변)	397	236	감) 161
30	영등포구 당산로54길 11 주변 외 노들로 구간	32,190	31,035	감) 1,155
31	영등포구 경인로846외 (영등포역~구로세무소)	4,475	5,145	증) 670	보고내용 참조
32	영등포구 영등포로 143 앞 에이블허브 빌딩 앞	1,395	677	감) 718	횡단보도 축소 및 차로 밑그림 제외
33	구로구 디지털로31길 86 앞 (두산아파트 앞)	146	70	감) 76	차로 밑그림 제외
34	당산로 142-1 (영등포구청 사거리)	76	48	감) 28
35	강서구 등촌동 652-14 주변	200	100	감) 100	현장실측 물량차이
36	강서구 등촌동 666-47 (강서구청 사거리) 주변	734	531	감) 203
37	양천구 목동 404-256 주변	350	331	감) 19
38	양천구 신정동 서남병원 교차로	52	26	감) 26	차로 밑그림 제외
39	구로구 거리공원 오거리 주변	480	426	감) 54	현장실측 물량차이
40	가양대교 남단 램프 (방화대교~가양역 방향)	941	725	감) 216	일부 포장도색구간 제외 및 현장실측 물량차이
41	발산로 주변 (공항동 1359-1~1359-10)	1,680	1,709	증) 29	현장실측 물량차이
42	남부순환로 구로IC 주변	5,316	5,328	증) 12
43	등촌로 (목동 성원2차 아파트 앞)	27	24	감) 3
44	목동동로 이마트 사거리 진입부	655	621	감) 34
45	국회대로 여의도방향 목동교 전방 400m 외	625	625	-	노면표시 제거
46	오목로(오목로 81~67 주변)	240	200	감) 40	보고내용 참조
47	양천구 신목로 120앞	207	138	감) 69
합 계		60,689	56,620	감) 4,069

○ 보고내용

- 제6차 작업지시 47개소에 대해 작업완료하였음.

- 연번 46,47번 구간은 1,4차 작업지시시 보류한 구간으로 관할기간(서울지방경찰청) 협의 및 무단횡단금지시설 철거가 완료되어 금번 6차에 작업완료함.

- 연번 31번 영등포구 경인로846외(영등포역~구로세무소)구간은 차로재구획 및 보행자 무단횡단금지시설 설치 지역으로 차로폭 구간 조정에 따라 일부물량이 증가됨.

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 중 일부 물량 변경이 불가피하여 현장여건에 적합하게 완료하였으며, 작업완료량에 대해서는 추후 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제6차 작업완료 내역서 1부.

2. 제6차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제6차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.