서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「도시계획정보시스템 고도화를 위한 정보전략계획(ISP) 수립 용역」8월 월간보고

「도시계획정보시스템 고도화를 위한 정보전략계획(ISP) 수립 용역」관련 2017년 8월 월간 수행내역을 아래와 같이 보고합니다.

- 아    래 -

❍ 공정율(전체대비) : 실적 61.4% (계획 61.1%, 달성율 100.5%)

❍ 주요내용

- 내‧외부 환경 및 정보기술 동향 등 환경분석 (완료)

․ 시스템별 응용구성 및 내용분석, 데이터구성 및 내용 분석

․ UPIS H/W, S/W 등 인프라 자료수집 및 분석

- GIS 솔루션 검토(에스리, 슈퍼맵, 정보, 지오투 등 4개사) (완료)

․ 2D 또는 3D 관련 솔루션 및 구현기능 등 소개

․ 3차원 시뮬레이션, 조회 및 출력, 각종 분석기능 등 검토

- 도시계획 관련 현황 분석 (진행중)

․ 서울시 및 국토부 UPIS 비교, 도시계획업무, IT운영관리, 국토부 표준 UPIS 운영현황, 도시계획정보시스템 현황 분석 등

․ 도시계획정보시스템 고도화 추진 방향성 도출

	< 용역 개요 >
□ 과업내용 : 도시계획정보시스템 고도화 / 자료입력체계 개선 방안 마련 □ 계약업체 : 피앤티컨설팅(주)외 1개사 컨소시엄 □ 기간/사업비 : `17.5.16∼`17.11.11(6개월) / 150백만원

❍ 향후일정

- ‘17. 9. 4 : 2차 중간보고 시행(※ 별도 보고)

․ 도시계획 정보화 비전 및 세부 전략과제 수립

․ 목표모델 설계 및 과제별 정의서 작성

- ‘17. 9. 11 : 상세 업무 프로세스 설계관련 실무자 확인(마포구청 방문)

․ 자치구 담당자 활용 부문 목표모델 설계 검토, 확인 등

붙임 1. 월간보고(8월) 1부.

2. 주간보고(12차-16주) 1부.

3. 공정표(8월) 1부.

4. 회의록(8월 월간보고) 1부.  끝.

주무관	류희영		용산공원전략팀장	홍현탁		도시계획과장	09/11 양용택
협조자
시행	도시계획과-13927	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-8339	/전송	2133-0736	/	hyyoo@seoul.go.kr	/	대시민공개