투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	조달구매 납품기한 연기요청(경춘선숲길 관리용 컨테이너)

1. 공원운영과-15246(2017.8.21.)호와 관련입니다.

2. 경춘선숲길 관리용 컨테이너 조달물품 구매 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 경춘선숲길 관리용 컨테이너 조달구매

나. 요구번호 : 12-17-2-35110-00

다. 연기요청 내역

물품식별 번 호	품명(규격)	단위	수량	단가(원)	금액(원)	납품기한
						당 초	변 경
22697606	컨테이너 하우스	대	3	8,100,000	24,300,000	‘17.9.16.	‘17.9.30.

라. 연기사유 : 부대공사 일정과 연계하여 추진하고자 납품기한 연기요청.  끝.

	북서울꿈의숲관리사무소장
주무관	김혜량		운영팀장	김남현		북서울꿈의숲관리사무소장	09/12 代김남현
협조자
시행	북서울꿈의숲관리사무소-6020	(		)	접수		(		)
우		서울 강북구 번동 산28-6 북서울꿈의숲 방문자센터2층	/
전화		/전송	02-2289-4040	/		/	부분공개(5)