문서번호	기반시설과-3643
결재일자	2017.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		박일연	09/12 최진석
협 조

‘17년 한강공원 야외수영장 보수공사

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.  .

한강사업본부 기반시설과

-‘17년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

설계변경(정산) 검토 보고

공사시행 중 물량 증･감에 따른 설계변경 보고에 대한 검토내용 및 조치계획을 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 :‘17년 한강공원 야외수영장 보수공사

공사내용 : 타일시공 5,095㎡, 수조도장 9,410㎡등

공사기간 : 2017. 04. 06. ～ 2017. 9.30.

시 공 사 : ㈜선진에인지 대표 김종성

도 급 비 : 1,417,952,470원

Ⅱ		변경사유 및 검토내용

변경사유

□ 실정보고 검토 및 현장여건에 따른 물량 증․감.

▹ 실정보고 (설계 변경사항) 검토결과

- 기반시설과-2023(2017.05.16), 기반시설과-2132 (2017.05.23)

- 기반시설과-2453(2017.6.13)

- 기반시설과-2589(2017.6.22.-공원기획과 요청사항)

▹ 설계변경 주요내용

- 난지물놀이장 바닥 균열보수

- 잠실,망원수영장 타일탈락

- 여의도수영장 안전난간설치

- 잠원,망원,잠실수영장 탈의실외부 천막설치

- 기타 바닥 물빠짐 불량구간 배수구 정비 및 그레이팅 파손교체등실시등

□ 주요 수량 변경내용

공종	단위	당초	변경	증·감	증감액(직접공사비)	비고
탑코팅	㎡	8,918	9,410	증492	증5,656,302
오일스텐	㎡	3,512	3,650	증138	증1,198.668
균열보수	m	0	707	증707	증13,178,480
작업인원	명	117	52	감65	감7,335,965
타일보수	㎡	0	106	증106	증8,091,934
탈의실 외벽설치및철거	개소	0	6개소	증6	증10,076,988
데크보수	㎡	0	137	증137	증4,719,513
휀스설치	경간	0	17	증17	증1,896,843

□ 금액변경

▹ 공사비

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
합 계		1,759,473,470	1,673,596,310	-85,877,160
도급비	공급가액	1,289,047,700	1,314,650,000	25,602,300
	부 가 세	128,904,770	131,465,000	2,560,230
	계	1,417,952,470	1,446,115,000	28,162,530
관급자재비		216,192,820	214,732,310	-1,460,510
이설비(폐기물처리비포함)		125,328,180	12,749,000	-112,579,180

Ⅲ		검토의견 및 조치 계획

검토의견

□ 설계 변경사항은 기 실정보고되어 작업지시된 사항으로 증가된 물량에 대한 설계변경은 적정한 것으로 판단됨.

□ 도급비 변경(증액)금액이 3,000만원 미만으로 설계변경심의 비 대상임.

첨 부  1. 변경내역서 1부

2. 공사 사진대지1부 . 끝.