문서번호	기전과-10215
결재일자	2017.9.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전과장	서부도로사업소장
안광순	양영민	09/12 한동근
협 조

『 마포대교 외 1개소 가로등 교체공사 』

설계 변경 검토 보고

2017. 9.

서부도로사업소

(기전과)

『마포대교 외 1개소 가로등 교체공사』

설계 변경 검토 보고

『마포대교외 1개소 가로등 교체공사』신규 공종 및 야간 작업으로 인한 물량 증·감이 발생하여 설계 변경 시행코자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 마포대교 외 1개소 가로등 교체공사

○ 도 급 자: ****************

○ 공사금액: ******************************

○ 공사기간: 2017.6.21. ~ 2017.9.18.

○ 공사규모: 마포대교 및 한남제1고가 가로등 149등 교체설치

□ 설계 변경

○ 설계변경 사유 : 신규공종 추가 및 작업 시간대 변경

∙ 신규 공종

- 한남제1고가 누전설로 교체

∙ 작업시간대 변경(주간작업 → 야간작업)

- 한남제1고가 가로등 철거 및 설치 주간 작업시 교통통제 곤란

∙ 물량 변경

- 한남제1고가 점검구 LED조명 (50→43EA)

- PVC시스케이블 철거 (1885→1443m)

- 고재처리 (4774→4250㎏)

○ 설계변경 내용

공종 (품명)		당초	변경내용
신규공종 한남제1고가 누전선로 교체	전선관 ST 36C	없음	누전선로 33m 2구간 설치용 전선관 58m
	전선관 ST 42C	“	누전선로 25m 1구간 설치용 전선관 3m
	후렉시블 전선관 36C	“	누전선로 33m 2구간 설치용 후렉시블 전선관 4m
	후렉시블 전선관 42C	“	누전선로 25m 1구간 설치용 후렉시블 전선관 2m
	전선관지지대 3/8“	“	누전선로 3구간 전선관 고정용 38개소
	케이블 CV 10㎟×1C	“	누전선로 3구간 케이블 (364m/4=) 91m
	접지선 GV 6㎟	“	누전선로 3구간 접지선 91m
	후렉시블 콘넥타 36C	“	누전선로 33m 2구간 연결 콘넥타 10개소
	후렉시블 콘넥타 42C	“	누전선로 25m 1구간 연결 콘넥타 10개소
품셈 변경 한남제1고가 등주 교체	가로등기구 설치	1	등기구 38등 야간 및 고가차도 할증 2.1 적용 (=(1+0.25+0.15)×1.5)
	가로등주 철거 및 설치	1	등주 38등 야간 및 고가차도 할증 2.1 적용 (=(1+0.25+0.15)×1.5)
	케이블 철거	1	케이블 418m(38등×11m) 야간 및 고가차도 할증 2.1 적용 (=(1+0.25+0.15)×1.5)
물량변경	조합터파기 및 되메우기	50㎥	마포대교 누선선로 상태 양호로 삭제
	10SQ/2C 케이블 철거 및 설치	100m	마포대교 누선선로 상태 양호로 삭제
	6SQ/2C 케이블 철거 및 설치	200m	마포대교 누선선로 상태 양호로 삭제
	한남1고가 점검구 LED램프	50	점검구 조명 교체 수량 변경 43EA
	가로등 케이블 철거	1,885	주간 공사 마포대교 물량 (111등×13m=) 1,443m
	고재 처리	4,774	등기구 케이블(=3×149) 및 등주(=100×38) 4,250㎏
	주간작업 신호수	없음	마포대교 가로등 교체 교통통제 신호수 3명
	야간작업 신호수	“	한남1고가 등주 및 누선선로 교체 교통통제 신호수 8명

○ 설계변경(총괄)금액

구분		금액 (원)			비고
		당초	변경	증,감
총공사비		45,951,480	51,805,000	5,853,520
도급비	공급가액	41,774,073	47,095,455	5,321,382
	부가가치세	4,177,407	4,709,545	532,138

○ 예산과목: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리,

기전시설물관리(도시개발특별회계),

일원터널 외 5개소 노후 조명시설 개선, 시설비

□ 보고자 의견(조치 계획)

○ 상기 본공사에 반영되지 않은 신규 추가 공정과 물량 증․감을 설계 변경하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 설계변경내역서 1부.

2. 원가 계산 검증확인서 1부.  끝.