문서번호	도로관리과-15071
결재일자	2017.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	09/12 배광환
협조

노면하부 동공탐사용역(1단계) 과업구간 조정 검토

2017. 9.

안전총괄본부

도로관리과

노면하부 동공탐사용역 과업구간 조정 검토

『2017년 노면하부 동공탐사용역(1단계)』추진결과 과업구간 조정이 불가피하여 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2017년 노면하부 동공탐사용역(1단계)

○ 과업내용 : 서울시내 간선도로 880km, 동공 530개소

○ 용역기간 : 2017.4.26. ~ 10.22.

○ 용 역 비 : 1,488백만원

○ 계 약 자 : 셀파이엔씨(주) 대표 곽정하

□ 현   황

○ 도심지 외곽 노선에서는 약 0.23개소/km의 동공이 발견되어 현장여건상 당초 목표(동공수 530개소)를 달성하는데 어려움이 있음

구 분	1차 탐사 (계획 / 탐사 / 분석)	2차 조사		확인비율 (개소/km)	비고
		천공	확인동공
계	245.7	77	56	0.23개/km
마 포 구	37.6	2	1	0.03개/km
노 원 구	138.7	51	36	0.26개/km
관 악 구	69.4	24	19	0.27개/km

○ 만회대책 추진현황

- 탐사장비의 설정값 변경 후 재탐사 실시(12개 자치구)

- 분석완료 구간에 대한 재분석 실시

※ 목표동공수 대비 50개소 부족

□ 검토결과

○ 과업구간 평균 동공발견 개소는 0.5개/km로 부족한 50개소에 대하여 탐사구간 100km를 제공하고 추가탐사에 따른 계약금액 변경없이 과업구간을 조정하고자 함

첨부 : 동공탐사 성과분석 실정보고 1부.   끝.