문서번호	소방행정과-10834
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
계약전문관	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김재형	전다영	박선호		09/13 정재후
협 조	현장대응단장		임명기
	119안전센터장		송장권

- 직원 근무환경 개선 및 효율적 청사관리를 위한  -

은평소방서 세탁물 건조대 설치 등 환경개선 공사 계획

2017. 9.

은평소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

은평소방서 세탁물 건조대 설치 등 환경개선 공사 계획

○ 본서 환경개선의 일환으로 세탁물건조대, 창고, 체력단련실 등 쾌적하고 효율적인 근무환경, 건강한 청사 환경을 제공하여 직원 사기를 진작하고자 함

○ 녹번 청사 누수부분을 보수하여 청사유지 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

추 진 근 거

□『 세탁물 건조대 외 2종 설치 요청 』

현장대응단-6903(2017.09.04)

□『 녹번119안전센터 건물 누수에 따른 공사 요청 』

은평구청 사회적경제과-12933(2017.09.05)

□ 『 2017 수의계약제도 개선계획 시행 알림 』

재무과-14392(2017.03.21)

Ⅱ

사 업 개 요

□ 사 업 명 : 은평소방서 세탁물 건조대 설치 등 환경개선 공사

□ 위    치

○ 현장대응단(은평구 통일로 962, 진관동)

○ 녹번119안전센터(은평구 은평로 245, 녹번동 48-5)

□ 공사규모

○ 현장대응단 및 본서

- 팔각정 부근 세탁물 건조대 설치(7500×2500×1800)

- 자재 창고 보관소 설치

- 탁구장내 바닥 보수(1.8m×20m )

- 4층 조경시설내 야외 휴게공간 조성(6000×4000)

○ 녹번119안전센터 임대 청사 3층, 4층 방수 공사

□ 사업기간 : 2017. 9.  ～ 2017. 10(약 2개월)

□ 소요예산 : 시설비 금17,850천원(금일천칠백팔십오만원)

□ 예산과목 : 소방행정기반 강화/직무환경개선/소방관서 시설물 유지보수/시설비및부대비/시설비

Ⅲ

사업추진 세부계획

□ 시설비 : 금17,850천원

○ 예산 집행 현황

	주요사업	배정액	집행액	잔액
	계	154,000	119,170	34,830
1	훈련탑 보수 및 역촌 수관건조대 보수	51,000	42,890	4,330
	훈련탑 보수 및 역촌 수관건조대 보수 설계비		3,780
2	시민교육장 보수	33,000	28,380	4,620
3	녹번 아스콘 공사	24,000	17,566	6,434
4	녹번 내진설계	36,000	26,554	9,446
5	시설유지	10,000	0	10,000

○ 집행 잔액 사용

- 시설 유지비 : 금10,000천원

- 훈련탑 및 역촌 보수 공사외 3건 집행 잔액

금24,830천원중 금7,850천원 사용

Ⅳ

추진방침 및 중점사항

□ 추진방침

○ 청사 공간활용에 의한 휴게공간 조성으로 건강하고 효율적인 근무환경 제공

○ 세탁물 건조대 등 직원복지 조성을 통한 사기 진작 및 적극적 업무환경 조성

□ 중점사항

○ 충분한 현장확인을 통한 진행으로 철저한 공사 추진 및 공사후 하자발생 방지

○ 업무추진의 객관성 및 효율적이고 투명한 예산 집행

○ A/S 등 사후관리의 용이성 확보

□ 계약방법

○ 1인견적 수의계약

○ 지방계약법시행령 제25조

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제6장 수의계약운영요령)

□ 일상감사 구분 :　비대상

○ 서울시 일상감사 규정 제4조(일상감사 대상) 및 별표 1

- 공사는 추정가격 2천 이상인 1인견적 수의계약일 경우 해당

□ 계약심사 구분 :　비대상

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제3장(계약심사운용요령)

- 전문공사는 추정가격 3억원 이상일 경우 적용

□ 제한여부

○ 지역제한 : 수도권 제한(A/S관련)

○ 자격제한 : 전문건설공사(실내건축 또는 시설물유지관리업) 면허 보유

Ⅴ

사업추진 일정

□ 수의시담 : 2017. 9월 중순

- 조달청사이트(G2B)를 이용한 전자 수의시담

□ 공사 계약 추진 : 2017. 9월 중순

□ 공사 진행 : 2017. 9월중순 ～ 10월중순

□ 준공검사 : 2017. 10월 중순

□ 현장감독 및 검사(수)

- 서울시 재무회계규칙 제111조(검사자의 지정) 및 별표 5

○ 현장감독 공무원 : 장비회계팀장, 녹번119안전센터장

○ (준공)검사자 :  계약,영선, 녹번센터 팀장

- 환경개선 및 방수 공사 준공 및 확인 ․ 검수

□ 대금지급 : 2017. 10월 중순

- 검수완료 후 대금지급 및 정산

Ⅵ

업무추진 로드맵

순 서	추 진 내 용	2 0 1 7
		9월							10월
1	기본계획 수립
2	공사발주
3	계약
4	공사시행
5	준공검사
6	대금지급

Ⅶ

행 정 사 항

□ 현장대응단에서는 공사 추진에 차질이 없도록 폐기물품(후정 수관) 등을 처리 및 이동조치 하여주시기 바랍니다.

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.