문서번호	소상공인지원과-8295
결재일자	2017.9.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시장환경개선팀장	소상공인지원과장
김병모	라태성	09/13 곽종빈

전통시장 안전취약 시설물 긴급보수 사업비 교부계획 (관악구)

2017. 9.

소상공인지원과

전통시장 안전취약 시설물 긴급보수 사업비 교부계획

전통시장 및 상점가의 깨끗한 쇼핑환경 조성과 노후화된 화재 위험요소 사전 제거 등 안전취약 시설물 긴급 보수·보강에 소요되는 사업비를 교부하고자 함

□ 관련 근거

○ 재난 및 안전관리기본법 제3조 제4항, 제4조 제1항 및 제25조의 2 제1항

○ 전통시장 안전취약시설물 개선 사업 예산배정 신청(관악구 일자리경제과-1616호, ’17. 8.13.)

□ 사업 개요

○ 사 업 명 : 삼성동시장 안전 등 환경 긴급보수

○ 추진기간 : ’16.12월 ∼ ’17.12월

○ 대상시장 : 삼성동시장

○ 사 업 비 : 700백만원(’16년 300백만원, ’17년 400백만원)

○ 사업내용 : 안전사고 방지를 위한 비가림시설 설치 및 철거, 소방시설물 설치

구 분	사업 내용	사업비(천원)
실시설계	시방서, 내역서, 설계도면 납품	25,000
감전 등 안전사고 방지를 위한 비가림시설 설치	비가림시설 2,000㎡ 설치	577,000
소방시설물, 공용조명등 설치	자동화재 속보 설비 1식, 자동화재 탐지설비 1식, 공용 조명등 55개	90,000
기타 경비	감리비, 시설부대비	8,000
합 계		700,000

○ 추진일정

- 공사시행              :  ’17. 8. ~ 11.

- 추진실적 및 정산보고  :  ’17.12.

□ 사업비 교부

○ 교부대상 : 관악구

○ 교부금액 : 400백만원(전액시비)

대상시장	공사내용	소요예산(천원)
삼성동시장	감전 등 안전사고 방지를 위한 비가림시설 설치	400,000

○ 예산과목

- 중소기업 및 소상공인 자립기반 확립, 전통시장 활성화 지원, 전통시장 전기안전점검 및 보수(자치단체자본보조)

○ 교부방법 : 해당 자치구 보조금 세입계좌로 입금

○ 집행방법

- 이 보조금은 전통시장 안전취약시설물 긴급보수를 위한 사업에만 집행되어야 하며 그 외 타 용도로 전용할 수 없음

- 사업완료 후 1월 내 정산 및 실적 보고

붙임  1. 전통시장 안전취약시설물 개선 사업 예산배정 신청 공문 1부.

2. 삼성동시장 사업계획 1부.

3. 정산보고서 및 보수사업 실적보고서 서식 1부.  끝.