설계변경(1차) 심의 의뢰서

공사명 : 2017 중구,용산구관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

의 뢰 부서명	중부수도사업소 급수운영과
공사 감독원	지방시설주사 유명수
검토 의뢰일시	2017. 9. 14

검 토 의 견 서

○ 공 사 명 : 2017 중구,용산구관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

○ 검토일시 : 2017.9.14.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

유용일

09/14

유용일

적정함

위    원

시설관리팀장

김상웅

김상웅

적정함

위    원

주무관

한상근

한상근

적정함

위    원

급수설비팀장

박장진

박장진

적정함

위    원

주무관

김헌중

김헌중

적정함

담    당

주무관

유명수

유명수

설계변경(1차) 사유서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2017년 중구,용산구관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 아스팔트 81a, 콘크리트 6a, 보도블록 8a, 아스팔트표층 24a

다. 공사기간 : 2017.06.22 ~ 2018.06.30

************************

**************************

2. 설계변경 사유 및 금액

가. 2017년 중구,용산구관내 포장도로 굴착복구공사의 시공 물량 증․감 발생     (변경 내역서 참조)

공 종	단위	당초면적	변경면적	증, 감
아스팔트	a	81	81	-
콘크리트	a	6	6	-
보도블록	a	8	6	감)2
아스팔트표층	a	24	37	증)13

나. 설계변경 금액 내역 : 증감없음                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감 액	비 고
도 급 비	***********	***********	-

첨부 : 설계변경 내역서 1부.  끝.