문서번호	시설과-5743
결재일자	2017.9.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
강경모	유진석	代유진석	09/15 이춘희
협 조
	공원운영과장		김용중

남산공원 샤워장 설치 변경계획

2017.  9.

중부공원녹지사업소

(시설과)

남산공원 샤워장 설치 변경계획

남산공원 북측순환로 목멱산방 주변에 설치 예정인 샤워장의 장소가 협소하여 시민들의 이용 편의를 위하여 제3초소 주변으로 변경하여 추진하고자 함.

□ 추진근거

○ 남산공원 샤워장 설치계획[시설과-5065(2017.8.21.)]

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 시공원 보수정비사업(남산공원 편의시설 설치)

○ 위    치 : 남산 북측순환로 입구 3초소 인근(중구 회현동 산1-2)

○ 사업기간 : 2017. 9~10월

○ 사업내용 : 샤워시설 컨테이너 2동 20.5㎡(남10.25㎡, 여10.25㎡)

○ 사 업 비 : 91,900천원(본청 60,000천원, 자체 31,900천원)

□ 사업추진 경위

○ 2017. 7. : 대상지 현장조사, 상수도 협의

○ 2017. 8. 23 : 예산재배정[6,000만원(공원녹지정책과)]

○ 2017. 8. 25 : 상수도 굴착협의(중부수도사업소→중구청)

○ 2017. 9. 01 : 샤워장 위치변경

○ 2017. 9. 04 : 상수도 굴착협의 완료(중구청→중부수도사업소)

○ 2017. 9. 14 : 상수도 굴착 완료(중부수도사업소)

□ 변경내역

구분	공사내용	변경전	변경후	비고
사 업 비		60,000천원	91,900천원	증31,900천원
내 역	샤워장 제작설치(조달구매)	48,000천원	53,400천원	증5,400천원
	상·하수도 공사	12,000천원	21,300천원	증9,300천원
	전기공사	-	11,400천원	증11,400천원
	온수기 저장시설(조달구매)	-	5,800천원	증5,800천원

○ 사업비 증액 원인

- 설치장소 변경에 따른 기반시설 공사비 증가

· 상수도 공사 : L=70m를 ⇒ L=86m로 16m 증가 및 전구간 도로                         굴착 및 아스콘포장 등에 따른 구조물 및 포장공 공정 추가

· 전기공사 : 전력선 신규 매립설치(L=242m) 등 전기공사

- 샤워장 내부 변경에 따른 조달구매비 증가

· 옥내 온수기(2대)를 외부 이전에 따른 창고 물품구매

□ 사업추진 방법

○ 컨테이너 제작설치(2동), 온수기 저장실 제작설치 : 조달구매

- 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도 개선, 공원                            유지관리 및 이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비,                          시설비(2015-401-01 도시개발특별회계)

○ 상수도 공사, 전기공사 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조                 제1항 5호 가목 기준에 의거 금액이 소액이고, 상수도, 전기, 공사를               전문으로하는 업체와 계약하여 9월에 조속히 공사를 완료하고자 함.

- 상수도 공사 : ㈜자이언 대표 최종식

(서울시 도봉구 도봉로169나길 45, 2층(도봉동))

- 전기공사 : ㈜비상이앤씨 대표 서순영

(서울시 마포구 도화길 50-12(도화동))

- 예산과목 : 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산                             및 산하공원 보수정비사업, 남산 및 산하공원시설물                            보수정비, 시설비(401-01)

□ 향후계획

○ 2017.09~10 : 착공 및 준공

○ 2017.10 : 시설물 인계(시설과 → 공원운영과)

붙임 : 1. 산출내역서(상수도, 전기) 각1부.

2. 사업자 등록증 각1부.  끝.

위  치  도

□ 위치도(설치장소 변경)

□ 현장사진