문서번호	기전과-10428
결재일자	2017.9.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전과장
안광순	09/15 양영민
협 조

『 마포대교 외 1개소 가로등 교체공사 』

2차 설계 변경 검토 보고

2017. 9.

『마포대교 외 1개소 가로등 교체공사』

2차 설계 변경 검토 보고

기전과-10215(‘17.09.12)호 『마포대교 외 1개소 가로등 교체공사』설계변경과 관련하여 내역서 상에 잘못 기입된 기계경비를 감액하여 2차 설계 변경 시행코자 함.

□ 공사 현황

○ 공 사 명: 마포대교 외 1개소 가로등 교체공사

○ 도 급 자: ****************

○ 공사금액: *************************

○ 공사기간: 2017.6.21. ~ 2017.9.18.

○ 공사규모: 마포대교 및 한남제1고가 가로등 149등 교체설치

□ 설계 변경

○ 설계변경 사유

∙ 공정변경으로 인한 기계경비 감액분 미반영

- 당초 947,044원에서 720,320원으로 감액

○ 설계변경 내용

공종 (품명)	당초	변경내용
마포대교 누전선로 교체	947,044원	마포대교 누전선로 교체 미실시로 터파기 및 되메우기 기경계비 720,320원으로 감액 (감액 226,724원)

○ 설계변경(총괄)금액

구분		금액 (원)				비고
		당초	1차 변경	2차 변경	증,감
총공사비		45,951,480	51,805,000	51,500,000	305,000
도급비	공급가액	41,774,073	47,095,455	46,818,182	277,273
	부가가치세	4,177,407	4,709,545	4,681,818	27,727

○ 예산과목: 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리,

기전시설물관리(도시개발특별회계),

일원터널 외 5개소 노후 조명시설 개선, 시설비

□ 보고자 의견(조치 계획)

○ 1차 설계변경시 반영되지 않은 기계경비 감액분을 반영 설계 변경하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 설계변경내역서(2차) 1부.

2. 원가 계산 검증확인서(2차) 1부.  끝.