문서번호	급수운영과-16553
결재일자	2017.9.15.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	한호진	09/15 전명수
협 조

준공기한 연기 보고(신설-86,87,89,93)

명에 의거 풍납동 외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 공사 현황

- 공 사 명 : 2017년 풍납동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)

- 급수공사 기한 연기 내역

지시번호	공사위치	공사개요	기존 공사기간	변경 공사기간	현장 상황
신설-86	*********	D=40** L=4*	2017.9.1.~ 2017.9.15.	2017.9.1.~ 2017.10.20.	신축공사 현장으로 비계 미철거되어 10월 공사 요청
신설-87	********	D=40** L=3*	2017.9.1.~ 2017.9.15.	2017.9.1.~ 2017.10.20.	신축공사 현장으로 비계 미철거되어 10월 공사 요청
신설-89	********	D=30** L=3*	2017.9.1.~ 2017.9.15.	2017.9.1.~ 2017.10.20.	신축공사 현장 자재적치되어 10월 공사 요청
신설-93	**********	D=30** L=5*	2017.9.8.~ 2017.9.18.	2017.9.8.~ 2017.10.20.	신축공사 현장으로 비계 미철거되어 10월 공사 요청

2. 연기 사유 : 신축건물 급수공사로 수요가에서 현장작업 일정 조정으로 인해 급수공사일 연기를 요청함

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

4. 조치내용

- 상기와 같이 수요가의 급수공사일정 연기 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 주호산업개발(주) 대표 박봉수에게 통보하고자 합니다.

붙  임 : 현장사진 1부.  끝.