투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기간 연기 계약의뢰(석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사)

우리 본부에서 시행중인 『석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사』와 관련 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 변경계약 의뢰현황 -

구 분	공사기간		계약금액	변경사유
	당초	변경
석촌지하차도 상부 도로 구조개선 전기공사	`16. 3.24. ~ `17. 9.19.	`16. 3.24. ~ `17.10.31.	변경없음	선행공종(토목) 연기 귀책사유 : 발주처

붙임 (1) 방침서 1부.

(2) 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	진종구		녹색성장과장	오삼록		설비부장	09/14 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-15793	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개