문서번호	한양도성도감-9571
결재일자	2017.9.14.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
김동욱	代정윤모	09/14 심말숙

『한양도성 안내표지판 제작 설치』 계약 변경 계획

문 화 본 부

(한양도성도감)

『한양도성 안내표지판 제작 설치」 계약 변경 계획

『한양도성 안내표지판 제작 설치』 관련하여 민원사항 반영 등을 위해 안내판 유형별 수량 및 설치 장소 등 설치계획 변경을 추진하고자 함

□ 물품제조·구매 개요

○ 계 약 명: 한양도성 안내표지판 제작 설치

○ 계약기간: ’17. 4. 13. ~ ’17. 10. 10.

○ 계약상대자: 범진아크릴 대표 신범식

○ 계약금액: 금56,590,770원

□ 추진 경위

○ ’17. 3. 6. : 한양도성 안내표지판 제작 설치 및  유지관리 시행 계획

○ ’17. 4. 13.: 안내표지판 제작설치 계약 체결 및 착수

□ 변경 내용

○ 안내판 구간 및 유형별 수량

구간		구간 합계	방향안내판						문화재안내판		지도 안내판	부분 교체		철거
			A 타입	B 타입	C 타입	D 타입	E 타입	F 타입	A 타입	B 타입		지도	방향
유형별합계	변경전	57	11	9	2	1	13	4	1	2	5	3	5	1
	변경후	96	35	8	11	4	18	4	1	1	3	3	7	1
백악	변경전	24	3	6		1	4		1		1	3	4	1
	변경후	31	5	4	2	2	6	2	1		1	3	4	1
낙산	변경전	2					1						1
	변경후	7	2		2	1	1						1
흥인지문	변경전	8	3				3			2
	변경후	12	7	1			2			1			1
남산	변경전	6		1			2				3
	변경후	6	2		1	1					1		1
숭례문	변경전	1					1
	변경후	19	11	1	1		6
인왕산	변경전	16	5	2	2		2	4			1
	변경후	21	8	2	5		3	2			1

○ 계약금액

당초	변경	비고
56,590,770원	62,240,000원	증 5,649,230원

○ 계약기간

당초	변경	비고
’17. 4. 13. ～ 10. 10.	’17. 4. 13. ～ 10. 31.	증 21일

□ 변경 사유

○ 안내판 유형별 수량

- 방향안내판 추가 설치 요구 민원사항 반영

· 백악 휴암부근 순성길 우회구간 안내

· 낙산 가톨릭대 방면 내부순성길 끊김, 낙산 정상 안내 등

- 횡단보도, 갈림길 등에 양방향으로 순성길 안내가 가능하도록 추가

□ 향후 추진 일정

○ ’17. 9. : 다국어 표기 번역(감수) 의뢰(도시브랜드담당관-단가계약업체)

- 내 용: DDP내 치성 안내판 등 신규 문구 안내판 5개

- 소요 예산: 약50,000원

- 예산과목: 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용,

한양도성 세계유산 등재 및 시민참여 활성화,

한양도성 자문위원회 운영, 사무관리비

○ ’17. 9. : 제작설치 변경계약 의뢰 및 계약(재무과)

○ ’17. 10. : 준공

붙임  1. 변경설계서 및 내역서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 안내판 유형별 위치도(변경) 1부.

4. 안내판 문안 1부.  끝.