문서번호	건축부-16169
결재일자	2017.9.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
김찬유		박범규	09/15 김진용
협조	주무관		시희식
	주무관		조문석

여의도 지하벙커 개선공사

3차 계약 및 총차 공기연장 검토보고

2017. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

여의도 지하벙커 개선공사

3차 계약 및 총차 공기연장 검토보고

「여의도 지하벙커 개선공사」관련 주변 하수도 공사등 추가 토목공사에 대한 3차 계약 및 총차 공기연장에 대하여 검토 보고 드림.

1		공사개요

공 사 명 : 여의도 지하벙커 개선공사

공사기간 : 2016.10.14.~2017. 9.30(총차)

- 1차 : 2016.10.14. ~ 2017. 9.30

- 2차 : 2016.12.14. ~ 2017. 9.30

공사금액 : 1,010,403,000원

- 1차 : 679,774,100원

- 2차 : 330,628,900원

시 공 사 : 두방종합건설(주)

2		추 진 경 위

'17.10.04.  : 공사계약

'17.10.14.  : 공사착공

'17.12.19.  : 2차 공사착공

'17. 9.15.  : 3차 계약 및 총차 공기연장 요청(상엔지니어링 건설사업관리자)

3		관련근거

여 2017-062('17.  9.15.)호에 의거 3차계약 및 총차 공기연장 요청

- 3차 계약 및 총차 공기연장 사유 : 하수도 개량공사 및 교통신호기 이설.노면표시등

추가 공사 실정보고 승인에 따른 3차공사 계약 및 총차 공사기간 연장

· 3차 공사금액 : 747,392,000원(공사기간 : ‘17. 9.20 ~ ’17.10.31)

· 총차 공사기간 연장 : 증 31일(‘16.10.14~’17.10.31)

4		건설사업관리자 검토의견

3차, 총차 계약내역                                          (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	검토결과
총차	1,010,403,000	1,757,795,000	증 747,392,000	적 정
3차	-	747,392,000	증 747,392,000	적 정

3차, 총차 공사기간

구 분	변경 전	변경 후	비 고
1차	'16.10.14. ~ '17.09.30.	'16.10.14. ~ '17.09.30.	변동없음
2차	'16.12.19. ~ '17.09.30.	'16.12.19. ~ '17.09.30.	변동없음
3차	-	'17. 9.20. ~ '17.10.31.	신규계약
총차	'16.10.14. ~ '17.09.30.	'16.10.14. ~ '17.10.31.	증 31일

3차계약 및 총차 공기연장 사유

- 하수도개량공사 및 교통신호기이설.노면표시 등 추가 공사 실정보고 승인에 따른         3차 공사 계약 및 총차 공기연장(증31일)이  타당함

건설사업관리자 검토의견

- 3차 계약 및 총차 공기연장(증31일) 연장함이 타당함

5		처리의견

건설사업관리자의 3차 계약 및 총차 공기연장 요청 내용이 적정하므로

“3차 계약 및 총차 공사기간 연장” 처리코자 함

- 연기귀책 사유 : 도시기반시설본부, 지체상금 부과 : 미부과

※ 3차계약에 따른 토목공사 관급자재는 별도 조달구매 발주

3차계약 및 총차 공기연장 요청 (건축부 → 건설총괄부)

3차계약 및 총차 공기연장에 따른 건설사업관리용역 기간 연장(‘17.11.15한)

- 당초  ‘16.11.24~’17. 9.30 → 변경 ‘16.11.24~’17.11.15(증 46일)

- 추가 감리비 소요예산 : 8,121,000원

건설사업관리용역 공기연장에 따른 감리비 확보 및 예산재배정 요청(건축부 → 안전총괄과)

붙 임 : 1. 3차계약, 총차 공사기간 연장 요청 공문(3차계약내역서, 예정공정표포함) 1부.

2. 건설사업관리용역 견적서 1부. 끝.