상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	삼성물산 대표 최치훈
(경유)
제목	공사기간 변경으로 인한 계약금액 조정 신청에 대한 회신

1. 삼건(뚝도) 제 2017-290(2017. 8. 9.)호와 관련입니다.

2. 귀사에서 시행한 『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』와 관련하여 공사기간 변경에 따른 계약금액 조정 신청에 대하여 아래와 같이 의견을  회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 설계변경으로 인한 계약금액 조정은 변경 계약시 합의서에 의한 계약 변경건으로 조정이 곤란함.

나. 공사기간 변경으로 인한 계약금액 조정은 CM사에서 검토된 금액범위내에서 상호 협의가 가능함.

붙임 : CM검토서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송병욱		시설과장	김도섭		시설안전부장	09/15 강신재
협조자
시행	시설과-8295	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1435	/전송	3146-1529	/		/	부분공개(5)