투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(경인선 오류~온수역간)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 트래픽스 TR-감-0902(2017.9.14.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 경인선 오류~온수역간 4,900Km부근 철도횡단 하수암거 설치공사 중 교통안전 시설물 설치공사

나. 공사장소 : 서울시 구로구 수궁동 주민센터 주변(부일로)

다. 원 인 자 : ㈜한국철도공사 수도권서부본부

라. 감 리 사 : ㈜트래픽스

마. 시 공 사 : ㈜창희이엔에스

바. 변경내용 및 요청 : 토목공사 지연에 따른 공사기한 절대부족

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	2016.8.19. ~ 2017.4.30.	2016.8.19. ~ 2017.09.29.	154일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)트래픽스,(주)창희이엔에스
주무관	고두규		주무관	정경성		기전과장	09/15 박재경
협조자
시행	기전과-12372	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개