문서번호	기반시설과-3727
결재일자	2017.9.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		전문관	기반시설과장
이건용		석대창	09/18 代조운행
협 조
	★주무관			박관호

작업완료 검사 결과 보고(10차)

-2017년 한강 수경시설 유지보수공사-

2017. 09.

기반시설과

작업완료 검사 결과 보고(10차)

[2017년 한강 수경시설 유지보수공사]

『2017년 한강 수경시설 유지보수 공사(연간단가)』의 제10차 작업지시에 따른 공사 완료 보고서가 접수되어, 현장에서 관련 공종 및 물량을 확인하고 그 결과를 보고하고자 함

□ 계약현황

◯ 계 약 자 : ㈜서령조경 (대표자: 황인숙)

◯ 계약기간 : ‘17. 3. 21. ~ ’17. 12. 29.

◯ 도급금액 : 금541,128천원

◯ 공사내용 : 뚝섬 음악분수 외 9개소 기계․전기․통신 등 시설물 유지보수

□ 작업 지시

◯ 지시 일자 : ‘17. 9. 14.

◯ 작업 기간 : ‘17. 9. 14. ~ 9. 18.

◯ 작업 비용

- 10차: 금37,796,000원

- 내역서                                            (단위:천원)

차수	전회누계	금회	합계	잔액
10	237,171	37,796	274,967	266,161
	43.83%	6.98%	50.81%	49.19%

◯ 작업 내역

․ 여의도 수상분수 : 스텐관 용접(400A), 배수펌프 교체(1HP), 합성데크 설치,

목재데크 철거,

․ 난지 거울분수 : Water Control Valve 교체, 인버터 교체, Power Supply 교체

․ 난지 물놀이장 : 인버터 교체

․ 뚝섬 물보라극장 : 물보라극장 이동 및 재설치

□ 작업 완료 보고((주)서령조경)

◯ 일    자 : ‘17. 9. 18.

◯ 작업내용 : 작업지시 내용과 동일

□ 검사 결과

◯ 검 사 일 : ‘17. 9. 18.

◯ 검 사 자 : 공업6급 석대창 외 2명(박관호, 이건용)

◯ 검사결과 : 작업완료 보고 내용과 특이 사항 없음

수상분수 부력체 보수 용접 작업	물놀이장 분수 인버터 교체

붙임 1. 작업완료 내역서 1부

2. 사진대지 1부.  끝.