문서번호	한양도성도감-9729
결재일자	2017.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이		신추교	09/18 심말숙
협조

<한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사>

과업기간 연장 계획

2017. 9.

한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사

과업기간 연장 계획

한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사에 따른 굴착 허가 승인에 시일이 추가로 소요되어 공사 기간을 연장하고자 함

용역개요

○ 용 역 명 : 한양도성 창의문 옥외소화전 설치공사

○ 계약금액 : 11,500,000원(일천일백오십만원)

○ 수행기관 : ㈜한빛안전기술단(소방 설계․공사업체)

○ 용역기간 : `17.07.03. ~ `17.09.30.

‣ 기간연장 : `17.7.03. ~ `17.11.30.

연장사유

○ 창의문 옥외소화전 설치공사는 소방용수설비 설치를 수반하는 공사로 수도관 배관공사에 따른 굴착 허가를 받아야하는 사업임

○ 종로구의 도로굴착허가 승인에 시일이 추가로 소요되어 공사기간을 불가피하게 연장해야 하는 사안임

향후 계획

○ `17. 10월 : 수도관 설치 공사 및 옥외소화전 설치공사 시행.  끝.