투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(여의도동17-9주변)

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대한잠사회 대잠관 제72호(2017.9.14.)호와 관련입니다.

3.  위 호와 관련하여 『교통신호기 원인자부담공사 공사기간 연장요청』에 대하여 아래와 같이 승인 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 영등포구 여의도동 17-9주변 교통안전시설물 설치공사

나. 공사장소 : 영등포구 여의도동 17-9(구, 잠사회관) 주변

다. 원 인 자 : 사단법인 대한잠사회

라. 감 리 사 : ㈜트래픽스

마. 시 공 사 : ㈜우진신호

바. 변경내용 및 요청 : 시설물 검사 및 통신 온라인 정상운영 확인을 위한 공사기간 연장요청

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	2017.8.9 ~ 2017.9.15.	2017.8.9. ~ 2017.09.29.	14일 증

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	대한잠사회,(주)트래픽스,(주)우진신호
주무관	고두규		주무관	정경성		기전과장	09/18 박재경
협조자
시행	기전과-12475	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개