서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	한양도성 안내표지판 제작 설치 계약 변경 의뢰

1. 한양도성도감-9571(2017. 9. 14.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 진행 중인 ‘한양도성 안내표지판 제작 설치’와 관련하여 아래와 같이 변경사유가 발생하여 계약변경을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물품제조·구매 개요

○ 사 업 명: 한양도성 안내표지판 제작 설치

○ 계약금액: 금56,590,770원(금오천육백오십구만칠백칠십원)

○ 계약업체: 범진아크릴 대표 신범식

나. 계약변경 내용

○ 변경계약 사유: 안내판 수량 증가

○ 변경내용

구분	변 경 전	변 경 후	비고
계약금액	금56,590,770원	금62,240,000원	증 5,649,230원
계약기간	’17. 4. 13. ～ 10. 10.	’17. 4. 13. ～ 10. 31.	증 21일

붙임  1. 한양도성 안내표지판 제작 설치 계약 변경 계획 1부.

2. 변경 설계서 및 내역서 1부.

3. 견적서 각 1부.

4. 안내판 유형별 위치도(변경) 1부.

5. 안내판 문안 1부.

6. 합의각서 1부(원본 별도 송부).  끝.

	한양도성도감과장
주무관	김동욱		도성관리팀장	代정윤모		한양도성도감과장	09/18 심말숙
협조자	계약1팀장	조현
시행	한양도성도감-9684	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 5층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2674	/전송	02-2133-1063	/	donguk@seoul.go.kr	/	부분공개(7)