문서번호	도로보수과-9349
결재일자	2017.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		김학동	09/19 신응수
협 조

『2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』

설계변경(제2차) 검토 보고

2017 . 9.

북부도로사업소

[도로보수과]

『 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부 』

설계변경(제2차) 검토 보고

우리 사업소에서 시행중에 있는『2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부』와 관련하여 시공물량 증·감 등에 따른 설계변경(제2차)을 시행하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 2017년 도로 및 교통 부속물 유지보수공사(연간단가)-북부

○ 공사개요 : 도로표지병 설치 1,530개, 중앙분리대 설치 100경간,

부속물 세척 7,434㎡, 과속방지턱 도색 2,067㎡

○ 공사기간 : 2017. 03. 06. ~ 2017. 12. 31.

○ 도 급 액 : 263,804,930원

○ 도 급 자 : ㈜은성홀딩스 (대표 : 윤화순)

Ⅱ		설계 변경 사유

○ 도로보수과-7990(2017. 8.11.)호 『교통안전사고 방지를 위한 표지병 정비 계획 보고』에 따른 표지병 설치

○ 도로 및 교통 부속물 순찰 지적사항, 120 민원사항, 관할 경찰서의 요청 사항에 따른 신공종 추가와 시공물량 변경.

○ 당초 설계 물량과 작업지시 물량 차이로 인한 단순 물량 증·감 사항 발생

Ⅲ		주요 변경 내역

○ 주요 공정 물량 변경 내역

연번	공종	규 격	단위	수 량		증·감
				당 초	변 경
1	과속방지턱 도색	융착식, 수동식	㎡	2,067	2,100	증)	33
2	관절형 중앙분리대 설치	H900XW2000	㎡	100	1	감)	99
		500×500mm	㎡	20	5	감)	15
3	구조물 세척		㎡	7,434	6,814	감)	620
4	도로표지병 설치	단면	개	500	700	증)	200
		단면(야간)	개	100	1,500	증)	1400
		양면	개	800	200	감)	600
		양면(야간)	대	130	1,200	증)	1070

○ 변경금액

(단위 : 원)

구분		수 량		증·감
		당 초	변 경
총공사비		383,312,930	383,312,930	-
도급비	공급가액	237,249,598	237,249,598	-
	폐기물처리비	2,573,066	2,573,066	-
	부가가치세	23,982,266	23,982,266	-
	계	263,804,930	263,804,930	-
관급비		119,508,000	119,508,000	-

Ⅳ		조치계획

○ 상기 보고와 같이 계약금액 범위내에서 물량 증·감에 대하여 설계변경 시행하고자 함

붙 임 : 설계변경(제2차) 내역서 1부.  끝.