문서번호	도로관리과-15422
결재일자	2017.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로관리팀장	도로관리과장
고동오		최연우	09/19 배광환
협 조
	주무관			정현중

- ‘17년 겨울철 대비 제설업무용 -

CCTV 일제 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 09

도로관리과

-‘17년 겨울철 대비 제설업무용 -

CCTV 일제 점검계획

‘17년 겨울철제설대책과 관련하여 사전강설예측 및 관내취약지점 모니터링을 위해 설치된 제설업무용 CCTV에 대해 일제점검을 실시하고 사전준비에 만전을 기하고자함.

□ 추진방향

○ 영상 장애를 발생시키는 노후 부속(비디오 서버등)의 교체

○ 제설기간중 안정적인 영상을 송출을 위한 CCTV 부속설비 점검

□ 정비대상 시설현황 : 제설 업무용 CCTV 9개소

구 분	개 소	위 치
계	9
강설 예측	5	영흥1, 우정1, 강화1, 인천1, 문산1
관내 취약구간	4	북악골프장1, 교보정보통신1, 자하문 삼거리1, 단군성전1

□ 세부 추진계획

○ 점검기간 : ‘17. 09. 25. ~ 10. 18.

○ 점검방법 : 시스템 제조·납품업체 전문기술자와 합동점검

- 도로관리과직원, 설치 업체

○ 주요 점검내용

- 설치된 CCTV설비의 동작 및 영상표출 상태 등을 점검

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검	CCTV화면 및 각종 기능 조작 작동 여부
	화면 수신상태 및 기능 조작 불량시 계측기를 통한 정밀상태
화면수신상태점검	송출된 영상신호를 네트웍비디오서버로 정상전송 및 화면수신 상태	비디오 서버 상태
전원입력선 상태점검	전원 공급선 안정화 상태
장비연결케이블 점검	각 장치간 연결케이블 결합 상태
장비 청소상태	랙 및 설치장비에 먼지 등 청소 및 청소상태
함체 크기 적정여부	기존 함체에 부속장비 인입 가능여부
기 타 사 항	야간용 라이트 작동여부

○ 점검결과 조치계획

- 경미한 사항 : 현장 시정조치 또는 익일 보수완료

- 정비 및 교체대상 : 노후부속 및 부대시설에 대해 발주계획을 수립하여 정비

○ 시스템 점검비지급

- 점검 결과에 따라 발주계획 수립시 지급

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 공공운영비

○ 점검자 여비지급

- 지급기준 : “공무원여비규정”에 의한 실비 정산

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 국내여비

□ 향후 추진일정

○ ‘17.  9.25. ~ 10.18.: 점검 및 현장 수리조치

○ ‘17. 10.19. ~ 10.20.: 정비 공사 발주

○ ‘17. 10.23. ~ 10.27.: CCTV 정비 시행

붙 임: 1. 제설업무용 CCTV 설치 현황 1부.

2. 점검 체크 리스트 1부.  끝.