문서번호	시설보수과-8060
결재일자	2017.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤동원		09/19 박병연
협 조
	주무관			유태용
	주무관			김승진
	주무관			김규춘
	주무관			조정갑

'17년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(제5~8차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘17년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(제5~8차)

관내 도로시설물의 손상, 파손부위에 대한 보수를 위하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2017년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가,IC-강서)

나. 공사기간 : 2017. 4. 24 ~ 12. 31

다. 계약금액 : 929,272,940원

라. 공사개요 : 포장보수 A=65a, 교면방수 A=1,400㎡ 신축이음보수

L=180m, 기타 1식

마. 계 약 자 : 이에스피건설 대표 강상수

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

차수	근거	작업지시	작업기간	작업완료	비고
5차	시설보수과-6116	2017.7.18	2017.7.18.~8.31	2017.8.31
6차	시설보수과-6208	2017.7.20	2017.7.20.~9.15	2017.9.07
7차	시설보수과-7014	2017.8.17	2017.8.16.~9.29	2017.9.07
8차	시설보수과-7032	2017.8.18	2017.8.18.~9.29	2017.8.31

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업지시내역	수량	완료내역	수량	비고
5차	1	오류철도 고가차도	A1, A2 조인트하부 조인트하부 누수	유도배수시설 (내마모성 고무판)	160m	유도배수시설 (내마모성 고무판)	155.5m
6차	2	행주IC교 (하행선)	A1~A2 방호울타리 방호책 손상	교량용차량 방호울타리(SB4)설치	94경간	교량용차량 방호울타리(SB4)설치	96경간
	3		A1~A2 방호울타리 방호책 손상	재래난간철거 횡재부	376m	재래난간철거 횡재부	384m

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업지시내역	수량	완료내역	수량	비고
6차	4	행주IC교 (하행선)	A1~A2 방호울타리 방호책 손상	재래난간철거 속주부	94본	재래난간철거 속주부	96본
	5		A1~A2 방호울타리 연석 방호책연석 손상	콘크리트표면보수 Eco terra,벽체	132㎡	콘크리트표면보수 Eco terra,벽체	122㎡
	6		A1~A2 슬래브하면 올림픽대로상 낙하물보호	낙하물방지시설	1,600㎡	낙하물방지시설	1,536㎡
7차	7	목동교	상행선 상부교면 아스콘 및 바닥콘크리트 열화	아스팔트 절단 (야간)	135.2m	아스팔트 절단 (야간)	163.6m
	8			레코MMA보수몰탈 (야간)	42.2㎡	레코MMA보수몰탈 (야간)	51.25㎡
	9	화곡고가차도	상,하행선 상부교면 아스콘 및 바닥콘크리트 열화	아스팔트 절단 (야간)	21.0m	아스팔트 절단 (야간)	26.4m
	10			레코MMA보수몰탈 (야간)	5.7㎡	레코MMA보수몰탈 (야간)	8.46㎡
	11	시흥IC	상,하행선 상부교면 아스콘 및 바닥콘크리트 열화	아스팔트 절단 (야간)	65.8m	아스팔트 절단 (야간)	70.6m
	12			레코MMA보수몰탈 (야간)	27.15㎡	레코MMA보수몰탈 (야간)	29.54㎡
8차	13	광 복 교	상,하행선 교면 상부면	소파포장복구 야간, 인력식 소파 포장복구	1.31a	소파포장복구 야간, 인력식 소파 포장복구	1.06a
	14		상,하행선 교면 상부면	택 코 팅 (야간)	1.31a	택 코 팅 (야간)	1.06a
	15		상,하행선 교면 상부면	성형줄눈설치 (야간)	128m	성형줄눈설치 (야간)	99m

다. 작업완료 검수사진(2017.9.13)

오류철도고가 유도배수시설 설치(5차)	행주IC교 교량용차량 방호울타리 설치(6차)

시흥IC 포장 및 바닥콘크리트 열화부 보수(7차)	광복교 소파포장복구(8차)

라. 개략공사비 : 217,079천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시 내용과 같이 이상없이 작업완료한 바, 추후 설계변경시 반영

하고

- 교량용차량방호울타리(SB4) 증가물량(2경간)에 대하여는 관급자재 수량변경구매 후 정산처리하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.