문서번호	주거재생과-11803
결재일자	2017.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주거재생계획팀장	주거재생과장		주거사업기획관
이수진	김승훈	국승열		09/20 김승원
협 조

해방촌 도시재생사업

HBC테마가로 조성사업 예산 재배정

2017. 09.

도시재생본부

(주거재생과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

해방촌 도시재생사업

HBC테마가로 조성사업 예산 재배정

해방촌 도시재생사업 활성화계획에 의거 추진중인 『HBC테마가로 조성사업』을 위한 사업비를 용산구에 재배정하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

○ 사 업 명 : HBC테마가로 조성사업

○ 위    치 : 용산구 녹산평대로 245~신흥로 53(한신아파트~기업은행 앞)

○ 사업규모 : 폭 8∼12m, 연장 550m

- 보도신설 및 차도축소, 보도포장(A=16a), 아스팔트 포장(A=27a),

보안등개량(27개소), 경관개선 시설물 조성 등

○ 총사업비 : 1,137백만원

○ 사업기간 : 착공일로부터 6개월

<해방촌 도시재생 테마가로 조성>

· 위    치 : 해방촌 일대 테마가로 3개 구간(폭 4~12m, 연장 2,510m)

· 사업내용 : 도로구조 및 보행환경 개선, 경관개선 시설물 설치, 가로정비 등

· 사 업 비 : 2,171백만원

사업구간	위치	정비내용	시행시기
HBC가로	한신아파트∼기업은행 사거리	- HBC상권 활성화에 대응한 가로환경 정비 - 경리단길과 차별화된 테마가로 조성	‘17년
남산가는 골목길	용산공원, 이태원∼해방촌∼남산	- 해방촌 구릉지를 따라 용산공원∼남산을 잇는 보행연계축 조성	‘17~18년
역사문화 탐방로	108계단∼모자원∼신흥시장∼해방촌교회∼해방촌성당∼보성여고~HBC가로	108계단, 모자원, 신흥시장 등 마을역사자원 연계	‘19년

Ⅱ		추진경위

○ ‘16.05 : 활성화계획 확정 이전 도시재생사업 시행 요청(시→구)

○ ‘16.08 : 예산 재배정(시→구, 설계비)

○ ‘16.10 : 기본및실시설계 용역 착수

○ ‘16.12 : HBC테마가로 구상(안) 주민설문 조사

○ ‘17.01 : 기술(디자인) 자문위원회 자문

○ ‘17.04 : 서울시 도시디자인 심의

○ ‘17.05 : 주민설명회

○ ‘17.06 : 서울지방경찰청 교통규제 심의

○ ‘17.07 : 실시설계 완료 및 계약심사

○ ‘17.09 : 예산배정 요청(구→시, 공사비)

Ⅲ		예산배정 및 향후 계획

○ 예산 요청액 : 1,137백만원

총 공사비	도급비	관급비	이전비 등	비고
1,137	526	270	341

○ 예산 재배정액 : 1,137백만원

재배정액	‘16년 명시이월			‘17년도 본예산			비고
	계	국비	시비	계	국비	시비
1,137	702	118	584	435	435	-

- 배정시기 : 방침 즉시

- 재배정처 : 용산구 토목과

- 예산과목 : 주민 중심, 주민 주도의 주거지재생사업 추진, (주택사업

특별회계)근린형 도시재생활성화사업 추진, 해방촌 도시재생사업 추진, 시설비

○ 향후계획

- ‘17.09 : 공사발주

- ‘17.10~’18.03 : 공사시행

붙임 : 1. 예산 재배정 요청서 1부.

2. 계약심사 결과서 1부.

<테마가로 조성 위치 및 HBC거리 마스터 플랜>