문서번호	정보시스템담당관-11103
결재일자	2017.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정정보기획팀장	정보시스템담당관
이운심		이영순	09/20 이기완
협조

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(9월2주차)

2017. 9.

정보시스템담당관

행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

주간업무 현황보고(9월2주차)

사업개요

❍ 사 업 명 : 행정포털 웹표준·웹접근성 개선 사업

❍ 사업기간 : 2017. 6. 1. ~ 2017. 12. 1.

❍ 계 약 자 : (주)시도우

❍ 사업금액 : 금113,000천원

주간 보고 내용

❍ 추진기간 : 2017. 9. 8. ~ 2017. 9. 14.

❍ 진 척 율

단계	계획	실적
전체	62%	49%
사업관리(착수)	100%	100%
분석	100%	35%
설계	100%	66%
구현	67%	14%
테스트	44%	0%
운영이관	0%	0%

❍ 추진실적

- 프로토타입 결과에 따른 개발 추진

- 관리자 기능, 시구공동게시판 적용 방안 검토

- 레이어 팝업 iframe 적용 방안 검토

- CSS 벨리데이션 및 속도개선 검증 방안 검토

- 로그인 화면 시안 검토

- 운영 이관 검증 작업을 위한 WAS 구성 변경 작업

❍ 향후계획(개발 일정)

- 09.21(목)~22(금) : 단위테스트

- 09.25(월)~29(금) : 수정 및 보완(종결)

- 10.10(화)~11(수) : 코드최적화 점검 및 작업 수행

- 10.12(목)~13(금) : 단위테스트 및 보완(종결)

❍ 담당자 의견

- 일정 지연 내역 : 계획대비 –13% 추진 중

- 일정 만회 방안 : 개발인력(퍼블리션 1명) 추가 투입

붙임 : 1. 주간업무 현황 보고서 1부.

2. 회의록 1부.

3. 작업분할표(WBS) 1부.  끝.