투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경(제1회)시행-2017년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사

우리 사업소에서 시행중인 『2017년 도로시설물(교량) 일상유지 보수공사』에 대한 설계변경(제1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

아   래 -

가. 공 사 명 : 2017년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사

나. 공사기간 : 2017. 3. 31 ~ 2017. 12. 31.

다. 계 약 자 : 에스비건설(주) 대표 조귀호

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감액
총공사비		1,156,644,800	1,216,644,800	증) 60,000,000
도급비	공급가액	992,868,000	1,029,231,637	증) 36,363,637
	부가가치세	99,286,800	102,923,163	증) 3,636,363
	계	1,092,154,800	1,132,154,800	증) 40,000,000
관급비		54,590,000	74,590,000	증) 20,000,000
이전비 및 기타		9,900,000	9,900,000

마. 설계변경 사유

- 도로시설물 일상유지보수 작업지시 및 완료에 따른 시공물량 증·감 및 신규공종 반영

- 주민참여예산사업 내역 포함 등

바. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 교량시설물 일상유지보수, 시설비

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물 운영(일반회계), 홍연교 보수공사, 시설비(도급비▲30,000,000)

- 교량안전과, 교량관리, 교량시설물 운영(일반회계), 증산2교 보도 정비공사, 시설비(도급비▲10,000,000, 관급비▲20,000,000)

붙임 : 1. 설계변경(1회) 보고서 1부.

2. 설계변경(1회) 내역서 1부.

3. 원가관리 제비율 검증표 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

								서울특별시 서부도로사업소장
주무관							최지락				주무관					김종성					시설보수과장					신동헌					서부도로사업소장						09/20 한동근
협조자				주무관							윤미란					관리단속과장							代신오기
시행			시설보수과-8306										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8375							/전송			300-8384					/														/	부분공개(5)