문서번호	도로보수과-4781
결재일자	2017.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
민병훈		이상호	09/20 代박영종
협조
	주무관		박성민

2017년 자전거도로 구축 및 유지보수 사업 예산재배정에 따른 (노면표시) 공사 추진계획

2017. 09.

성동도로사업소

[도로보수과]

「2017년 자전거도로 구축 및 유지보수 사업」

예산재배정에 따른 (노면표시)공사 추진계획

2017년 자전거도로 구축 및 유지보수사업 시행을 위한 예산 재배정 및 공사시행 협조요청과 관련하여 재배정된 예산현황과 (노면표시)공사 추진계획에 대해 보고드림.

□ 예산 재배정 현황 : 64,580,000원

○ 자전거정책과-6416호(2017.06.09.), -8998호(2017.08.09.)

- 배정액 : (당초) 59,200,000원 (변경) 14,070,000원

※ 관리기관(부서)별 예산 재배정 오류로 수정 재배정처리

○ 자전거정책과-9280호(2017.08.18.)

- 배정액 : 48,100,000원

○ 자전거정책과-9732호(2017.08.30.)

- 배정액 : 2,410,000원

○ 예산과목 : 도시교통본부 자전거정책과 / 자전거이용시설 확충 및 관리

- 유지보수(1,2단계)사업 : 자전거도로 유지보수 / 시설비

- 천호대로 자전거도로 구축사업 : 도심연결 자전거도로망 구축 / 시설비

□ (노면표시)공사위치 및 개요

사업명	위치	사업비 (천원)	사업내용	비고 유관기관 병행공사
유지보수 1단계	성동구 고산자로 시설관리공단 교차로	14,070	1. 노면표시 - 도색,제거 1,744m - 자전거마크설치 10개소 2. 미끄럼방지포장 55㎡ 3. 교통안전시설 - 시선유도봉설치 29개소	1.기전과 자전거전용도로신호등 2.성동구(교통행정과) 난간철거, 보도턱낮춤 등 토목공사
천호대로 자전거구축사업	광진구 천호대로 광장사거리~천호대교	48,100	1.노면표시 - 도색,제거 2,324m - 자전거마크설치 5개소 2. 미끄럼방지포장 240㎡ 3. 도로표지병(발광형)설치 75개소	1.기전과 - 자전거전용교통표지 2.광진구(교통행정과) - 토목공사 : 가로수이설, 경계석·우수받이 철거,재설치 자전거도로포장 등
유지보수 2단계	광진구 아차산로 뚝섬역 5번출구	2,410	노면표시 도색,제거 411m	광진구(교통행정과) - 보도턱 낮춤

□ 추진계획 및 공사일정

○ 자치구 토목공사 및 교통신호 작업완료 후 노면표시(도색,제거)공사 작업추진

○ 노면표시 작업 :

- 자차구 토목공사 및 기전과 교통신호 작업후 「2017년 노면표시유지보수공사(연가단가)」업체인 홍기건설산업(주)에 작업지시

○ 시선유도봉 설치 : 도로보수과 직영보수반에게 작업 지시

- 도로교통안전 시설물 자재로 고도의 기술을 필요로 하는 작업이 아닌 단순

작업이며, 설치비용이 소액으로 별도 공사업체 계약, 작업에 어려움 예상

※시선유도봉 29개소 설치비 : 693,000원(자재-시선유도봉, 제경비포함)

○ 미끄럼방지포장 시공 : 조달청 관급자재 구매시 납품업체에서 시공

○ 융착식테이프(자전거마크) : 조달청 관급자재 구매시 납품업체에서 시공

○ 도로표지병(발광식,태양열전지) : 조달청 관급자재 구매시 납품업체에서 시공

○ 관급자재 구매

- 융착식노면표시용 페인트 : 사용량이 소량으로 별도 조달청구매계약 없이 기존 「2017년노면표시유지보수공사(연간단가)」에서 조달계약되어 사용중인 ㈜지혜안전의 백색(P4), 황색페인트(P4)를 사용하여 시공

- 미끄럼방지포장재 : 현장도착설치도가 기준이므로 조달청 단가계약업체중 규정에 적합하고 저렴한 제품을 사용하여 관급자재로 구매·설치

- 시선유도봉 : 도로보수과에서 도로보수용으로 사용중인 동일한 규격의 시선유도봉을 조달구매하여 사업소 적치후 사용

- 융착식테이프(자전거마크) : 조달청 단가계약후 현장 설치

- 도로표지병(발광식, 태양열전지) : 조달청 단가계약후 현장 설치

○ 공사일정

- 관급자재 구매 : 2017.10.30.

- 공사기간(완료일) : 2017.11.30.

□ 행정사항

○ 상기와 같이 우리사업소와 계약체결되어 공사시행중에 있는 「2017년 노면표시유지보수공사(연간단가)」 업체에 노면표시 작업지시를 하여 자전거도로 유지보수 (1,2단계)사업 및 자전거도로 구축사업을 추진하고자 하며, 작업완료후 설계변경에 반영 및 정산처리 하고자 함.

붙임 : 1. 관련공문 4부.

2. 사업별 공사계획도 각 1부.  끝.