의원 요구 자료 제출

시 행	생활환경과-13889
결재일자	2017.9.20.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		도시청결팀장	생활환경과장	대기기획관	기후환경본부장	결재
권형택		최형준	구본상	정광현	09/20 황보연
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1320번, 강성언 의원,교육위원회)

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

강성언 의원(교육위원회, 더불어민주당)

ㅇ 요구번호 : 1320

4. 오동근린공원 복원 조성사업(오현 쓰레기 적환장 지하화 사업) 진행

부진 이유

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 강북구 번동 122번지 일원(오동근린공원 내)

○ 규    모

- 공원복원(지상) : 6,740㎡

- 오현적환장(지하) : 4,378㎡(시설연면적 : 8,129.6㎡)

○ 사업내용 : 오동근린공원 복원 및 오현적환장 지하화

○ 사업기간 : 단계별 추진일정

- 1단계 : 오현적환장 지하화(설계 : ’17 ~ ’18 / 공사 : ’19 ~ ’20)

- 2단계 : 상부 공원복원(설계 : ’19 / 공사 : ’20)

○ 사 업 비 : 28,841백만원

- 연차별 투자계획

(단위  : 백만원)

구 분	총사업비	기 투자액	2017년	2018년	2019년	2020년
시 비	28,841	1,439	1,400	2,600	13,002	10,400

□ 추진계획

○ ’17. 9 : 도시관리계획 결정(변경) 신청 (구 → 시)

○ ’17.11 : 시 도시공원위원회 자문(시 푸른도시국)

○ ’18. 1 : 시 도시계획위원회 심의(시 도시계획국)

○ ’18. 3 : 도시관리계획 결정고시(용도지역, 도시계획시설)

○ ’18. 9 : 기본설계완료

○ ’18.10 : 2단계 투자심사

○ ’19. 4 : 실시설계완료

○ ’20.12 : 적환장 지하화 및 상부 공원조성공사 완료

□ 추진상황

○ 오동근린공원 복원 조성사업(오현 쓰레기 적환장 지하화사업)은 관련 행정

절차에 따라 정상 추진되고 있으며, 현재 강북구에서 도시관리계획 결정

(변경) 신청 중에 있음.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (생활환경과)	담당사무관	최 형 준
	☎2133-3732	주무관	권 형 택
	작 성 일 : 2017. 9. 19

따로붙임 : 사업추진절차 및 추진 일정 1부. 끝.

폐기물처리시설 및 공원조성사업 추진 일정

구 분			추 진 내 용			추진일정
도시계획시설 중복 결정			현황조사 및 여건 분석
			도시관리계획 입안도서 작성			∙ ’17. 2.
			도시관리계획 입안 (강북구)			∙ ’17. 3.
			주민의견청취 및 관련부서 협의			∙ ’17. 4. ～ ’17. 5.
			구의회의견청취 / 구 도시계획위원회 자문			∙ ’17. 6. ～ ’17. 8.
			도시관리계획 결정(변경) 신청 (구→시)			∙ ’17. 9. ～ ’17. 10.
			서울시 도시공원위원회 자문			∙ ’17. 11.
			시의회 의견청취			∙ ’17. 12.
			서울시 도시계획위원회 심의			∙ ’18. 1. ～ ’18. 2.
			도시관리계획 결정(변경)고시 (용도지역, 도시계획시설)			∙ ’18. 3.
폐기물 처리시설 건립			기본설계			∙ ’18. 4. ∼ ’18. 9.
			투자심사(2단계심사)			∙ ’18. 10.
			실시설계			∙ ’18. 11.∼ ’19. 4.
			건축공사 시행			∙ ’19. 5. ∼ ’20. 12.
지상부 공원조성			공원조성계획 용역			∙ ’19. 3. ∼ ’19. 12.
			(주민의견청취 및 관련부서 협의)			∙ ’19. 8. ∼ ’19. 9.
			(공원조성계획(안)심의 요청 / 구→시)			∙ ’19. 10.
			(서울시 도시공원위원회 심의)			∙ ’19. 11.
			(공원조성계획 결정(변경) 고시)			∙ ’19. 12.
			실시설계			∙ ’20. 1. ∼ ’20. 6.
			공원조성공사 시행			∙ ’20. 7. ∼ ’20. 12.

※ 상기 일정은 정상적 추진 시 작성된 일정으로 향후 관계기관 협의 등 인허가 과정에서 변경될 수 있음