문서번호	정보기획담당관-15312
결재일자	2017.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		IT투자심사팀장	정보기획담당관
김경숙		김천억	09/20 이기완
협조

『서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역』

추진현황보고(17주차)

2017. 9.

정보기획담당관

『서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역』

추진현황보고(17주차)

『서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역』사업 17주차 추진 현황을 아래와 같이 보고드림

▢ 사 업 명 : 서울시 정보시스템 운영 성과관리 체계개선 IT컨설팅 용역

▢ 추진기간 : 2017.09.13.~09.19.(17주차/전체22주)

▢ 사 업 자 : ㈜케이씨에이

▢ 추진실적

번호	작업 구분명	추진기간	단계	비중	금주달성율		전체 진척율
					계획	실적
1	프로젝트 착수	2017. 5.24.∼ 6. 7.	착수	****	****	****	****
2	환경분석	2017. 6. 8.∼ 7. 5.	분석	*****	*****	****	*****
3	현황분석	2017. 7. 6.∼ 9. 6.	분석	*****	****	****	*****
4	개선방안 도출	2017. 9. 7∼ 9.27.	도출	*****	****	****	*****
5	이행계획 수립	2017. 9.28.∼10.18.	수립	****	-	-	-
6	완료보고서 작성	2017.10.16.∼10.24.	작성	****	-	-	-

- 현황분석 산출물 보완(계속)

- 개선방안 수립

·성과지표 Pool 검토 및 보완(계속)

·정보시스템 운영 성과측정 매뉴얼 작성(계속)

▢ 차주계획

- 현황분석 산출물 품질 검토 보완

- 개선방안 수립

·정보시스템 운영 성과측정 매뉴얼 작성(계속)

·미래업무 프로세스 설계서 작성

[붙임1] 주간업무현황보고서(17주차) 1부.

[붙임2] 서울시 정보시스템 운영 성과측정 모델 매뉴얼(초안) 1부.

[붙임3] 서울시 정보화 성과지표 가이드(안) 1부.  끝.