문서번호	기전과-6695
결재일자	2017.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
신대중		곽희영	09/20 代박영종
협조	주무관		이명호
	주무관		김수진

『2017년 횡단보도 확충정비사업(광진구)』

교통안전시설물공사 시행계획

2017. 9.

성동도로사업소

(기  전  과)

『2017년 횡단보도 확충정비사업(광진구)』

교통안전시설물공사 시행계획

안전하고 편리한 보행환경 개선를 위한 2017년 횡단보도 확충정비사업 대상지 확정 및 예산이 재배정되어 아래와 같이 시행하고자 보고드림.

관련근거

○ 교통운영과-15823호(2017.08.17.)

- 횡단보도 확충정비 사업 예산 재배정 및 공사시행 요청(중곡제일시장 앞등 3개소)

예산 재배정 내역

예산과목	공 사 위 치	예산배정액(천원)
교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 보행불편해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비(401-01)	합 계	145,809
	중곡제일시장 앞	신호시설	58,600
		안전표지	1,023
	동서울우편집중국 앞	신호시설	77,540
		안전표지	660
	건대입구사거리	신호시설	7,986

추진계획

○ 교통신호기공사

- 개략 소요예산 : 금145,122천원

(개략)(단위 : 천원)

공사위치	공사내용	도급비	이전비	총 공사비
중곡제일시장 앞	신호등 신설 6조, 이설 6조 지주 신설 4본, 이설 2본, 철거2본 기타 1식	52,817	1,009	53,826
동서울우편집중국 앞	신호등 신설 8조, 철거 1대 지주 신설 3본 기타 1식	44,835	9,773	54,608
건대입구사거리	제어기 신설 1대 신호등 이설 2조 지주 이설 1본 기타 1식	36,328	360	36,688

- 추진방법 : 일반경쟁입찰(지역제한)

- 입찰자격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업을 등록한 업체로 입찰               공고일까지 서울시에 주된 영업소를 둔 업체

- 공사기간 : 착공일로부터 90일

- 검토의견 : 현장 실시설계 결과 예상공사금액이 당초 재배정된 예산보다 증가하여 교통운영과에 추가 재배정 요청하여 공사를 추진하고자 합니다.

- 요청금액 : 총 996천원                            (개략)(단위 : 천원)

공사위치	기배정금액	예상금액			추가 요청금액
		도급비	이전비	총 공사비
합 계(총)	144,126	133,980	11,142	145,122	996
중곡제일시장	58,600	52,817	1,009	53,826	-4,774
동서울우편집중국	77,540	44,835	9,773	54,608	-22,932
건대입구사거리	7,986	36,328	360	36,688	28,702

○ 교통안전표지공사

- 개략 소요예산 : 금1,683천원                       (개략)(단위 : 천원)

공사위치	공사내용	공사비
중곡제일시장 앞	표지판 신설 4매	1,023
동서울우편집중국 앞	표지판 신설 4매	660

- 추진방법 : 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업    지시하여 공사시행하고 설계변경에 반영

- 계약업체 : ㈜전흥건설

첨  부 : 1. 관련공문 1부.

2. 설계도면 및 내역서(교통신호시설) 각 1부.

3. 설계도면 및 내역서(교통안전표지) 각 1부.  끝.