문서번호	급수운영과-25570
결재일자	2017.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
이용호		이상무	09/21 김정수
협 조

공사현장 실정보고에 따른 검토 보고

(구로동 256번지 외 3개소 배급수관 정비공사)

2017. 09

강서수도사업소

(급수운영과)

공사현장 실정보고에 따른 검토 보고

우리사업소에서 시행하는『구로동 256번지 외 3개소 배급수관 정비공사』에 대하여 시설관리공단으로 부터 실정보고가 있어 이를 검토코자 합니다.

1. 공사 현황

가. 공 사 명： 구로동 256번지 외 3개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요： D=20~300mm, L=1,922m

다. 공사기간： 2017.05.22 ~ 2018.01.11

라. 공사금액 : 1,512,038,600원(도급액:579,038,600원)

마. 계약상대자： ㈜송암홀딩스 대표 공연

2. 실정보고 내용 및 검토의견

▶관련문서 : 공사감독2처-9979(2017.9.12.), 9980(2017.9.12)

연번	실정보고 내용	공단 조치의견	검토 결과
1	<1구간 관로매설 방향 변경> ○1구간중 신도림동 648번지 앞은 110m 구간은 당초 아스팔트로 관을 부설토록 설계되었으나 굴착한 바 장애물(하수도 및 통신박스)로 인해 관로매설이 불가한 실정임	○ 1구간중 신도림동 648번지 앞은 110m 구간은 장애물로 인해 아스팔트 방향에서 보도방향으로 변경하여 관을 부설코자함 관로부설 도종변경으로 인해 공종물량 증•감 발생(개략공사비 : 647천원 증액)	○ 공단 의견과 같이 장애물로 관로 부설이 불가한 구간에 대하여 관로 부설 방향을 아스팔트에서 보도로 변경토록 하고 이로인해 변동되는 시공물량은 추후 설계변경시 반영토록 통보코자 함.
1	<2구간 관로매설 방향 변경> ○2구간중 신도림동 644번지 앞은 104m 구간은 당초 아스팔트로 관을 부설토록 설계되었으나 굴착한 바 장애물(하수도 및 통신관로 등)로 인해 측구쪽 외에는 관로매설이 불가한 실정임	○ 1구간중 신도림동 644번지 앞은 104m 구간은 장애물로 인 해 아스팔트 방향에서 측구방향으로 변경하여 관을 부설코자함 관로부설 방향변경으로 인해 공종물량 증•감 발생(개략공사비 : 2,291천원 증액)	○ 공단 의견과 같이 장애물로 관로 부설이 불가한 구간에 대하여 관로 부설 방향을 아스팔트에서 측구쪽으로 변경토록 하고 이로인해 변동되는 시공물량은 추후 설계변경시 반영토록 통보코자 함.

3. 조치 의견

실정보고에 대한 검토결과를 공단에 통보, 이를 이행토록하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

따로붙임 :  1. 시설관리공단 실정보고서 1부. 끝.