문서번호	도로보수과-9472
결재일자	2017.9.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
최병수		김학동	09/21 신응수
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경(제1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

도로보수과

설계변경(제1회) 검토 보고

[ 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 ]

우리사업소에서 시행중에 있는 『2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 시공물량 증․감에 따른 변경 사항이 있어 아래와 같이 설계변경 검토 내용을 보고 함.

공사현황

❍ 공 사 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사개요 : 차선도색 232,838m,  차선제거 8,700m

❍ 공사기간 : 2017. 03. 15. ~ 2017. 12. 31.

❍ 계 약 자 : *****************

❍ 계약금액 : *************

관련근거

❍ ***********************************

설계변경 사유

❍ 노면표시 시공물량 증 ․ 감에 따른 공종별 수량 조정

설계변경 내용

❍ 공사비 변경

구 분		설계변경 금액(원)		증․감(원)	비 고
		당 초	변 경
총공사비		839,000,000	839,000,000
도급액	공급가액	471,580,437	519,549,873	증47,969,436
	부가세	47,158,043	51,954,987	증 4,796,944
	계	518,738,480	571,504,860	증52,766,380
관급자재비		244,582,000	267,495,140	증22,913,140
이 전 비		75,679,520	0	감75,679,520

❍ 주요공정 변경 내역

공 종	규격	단위	당초	변경	증․감		비고
백색실선	수동식	m	21,102	25,076	증)	3,974
백색파선	수동식	m	26,292	26,403	증)	111
황색실선	수동식	m	38,601	42,902	증)	4,301
황색파선	수동식	m	9,201	14,710	증)	5,509
청색실선	수동식	m	2,210	6,200	증)	3,990
청색파선	수동식	m	1,440	410	감)	1,030
문자/기호	수동식	m	43,292	53,429	증)	10,137
횡단보도	수동식	m	90,700	70,552	감)	20,148
제거	수동식	m	8,700	10,700	증)	2,000
합 계		m	241,538	250,382	증)	8,844

- 표지병 변경내역

공 종	종 류	당초	변경	증․감		비고
도로표지병 설치(개)	130×110×30	4	4
도로표지병 제거(개)	130×110×30	16	28	증	12
합 계		20	32	증	12

조치계획

❍ 감리사로부터 제출된 설계변경 내역에 대하여 검토한 결과 계약수량 대비 시공물량 증 ․ 감 사항이 적정하므로, 상기 내용과 같이 설계변경(1회)을 시행하여 공사추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 변경설계서(1회) 1부.  끝.