문서번호	도시철도토목부-12434
결재일자	2017.9.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이경훈		윤방식	09/21 김진팔
협조
	주무관		서재원

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(총괄 및 4차)』

ES(2회) 및 사업관리기술자 투입계획 변경 검토보고

2017. 09.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(총괄 및 4차)』

ES(2회) 및 사업관리기술자 투입계획 변경 검토보고

「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」의 물가변동(2회) 및 건설사업관리기술자 투입계획 변경에 대해 검토한 보고 임.

※관련문서 : 대한(철도) 제17-177(2017.09.14.)

1

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

❍ 공사개요 : 연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

❍ 용역금액 : 총괄) 1,980,979천원

4차)   722,000천원

❍ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 이우정 외 2

❍ 용역금액 : 총괄) 2015.03.13. ~ 2018.08.08.

4차) 2016.12.01. ~ 2017.12.31.

2

추 진 현 황

❍	'15.03.13.	:	총괄 및 1차 용역 계약
❍	'15.03.13.~'15.12.24.	:	1차 용역 시행
❍	'15.12.25.~'16.04.13.	:	2차 용역 시행
❍	'16.01.01.	:	물가변동 1회 (3.46%)
❍	'16.04.14.~'16.11.30.	:	3차 용역 시행
❍	'16.12.01.~	:	4차 용역 시행
❍	'17.01.01.	:	물가변동 2회 (3.79%)

3

변 경 내 용

❍ 물가변동(2회)에 따른 계약금액 조정(총괄)

- 물가변동 현황

․물가변동 조정기간 : 365일('16.01.01~'17.01.01)

․물가변동 조정율 : 3.79%(품목조정)

․물가변동 적용금액 : 43,135천원

❍ 4차분 건설사업관리기술자 투입계획 변경

․당초 : (중급) 2017.11.01. ~ 2017.12.31.

변경 : (초급) 2017.10.10. ~ 2017.12.22.

․변경사유 : 서울외곽순환고속도로 하부 터널굴착 구간 안전관리를 위한 건설사업관리기술자 투입계획 조정

4

조 치 계 획

❍ 총괄 및 4차용역에 대하여 물가변동(2회)에 따른 계약금액 및 건설사업기술자 투입계획을 아래와 같이 변경하고자 함.

❍ 계약금액 및 계약기간 변경

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 (감)	비고
총괄 (2회)	계약금액	1,980,979	2,024,114	43,135
	기 간	2015.03.13.~ 2018.08.08	2015.03.13.~ 2018.08.08	변경없음
4차 (1회)	계약금액	722,000	722,000	변경없음
	기 간	2016.12.01.~2017.12.31.	2016.12.01.~ 2017.12.22.	감 9일

붙임 : 1. 변경계약 요청서 및 변경설계서(총괄 및 4차). 1부.

2. 합의각서(총괄 및 4차) 각1부.

3. 물가변동(2회) 조달청 검토의견 1부.  끝.