문서번호	시설보수과-8402
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
이동섭	김종성	신동헌	09/22 한동근
협 조

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속-2차)

준공기한 연기 검토보고

2017. 9

서부도로사업소

(시설보수과)

사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속-2차)

준공기한 연기 검토보고

우리 사업소에서 시행하는 ‘사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)’ 관련, 시공사의 2차분 준공기한 연기 요청(감리단 검토)에 따른 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

○ 공사기간 : (총차) 2016. 4. 12 ~ 2017. 10. 11

(2차) 2017. 8. 1 ~ 2017. 10. 11

○ 공사규모 : 교량확장 폭30m→37m, 6차로→9차로

성능개선 폭 10m, 연장 90m, DB18→DB24

○ 계 약 자 : 신안종합건설

○ 도 급 액 : 3,302,821천원 (2차:1,760,600천원)

□ 추진경위

○ 2016. 04. 12 : 공사착공

○ 2017. 06. : 확장부 교량 구조물 시공 완료

○ 2017. 07. : 1차공사 준공

○ 2017. 09. : 2차공사(성능개선) 시공중 (구조물 철거)

□ 준공기한 연기 검토

○ 연기사유(감리단 의견)

- 장마철(7,8월) 빈번한 호우로 인한 시공 지연

▸ 기상청 강우일수 확인 41일 우천 지연

○ 연기사유 적정성 검토

- 사천교는 현재 성능개선공사 진행중으로 기존 교량(구교) 철거작업을 실시하고 있으며, 시공사의 2차공사 준공연기 요청에 대한 감리단 의견의 적정성을 검토한 결과,

※ 금년도 하절기(7,8월) 빈번한 우천으로 인하여 교면포장 및 방수작업이 지연되어 상부의 교통 우회처리가 순연됨에 따라 성능개선부 구조물 철거작업 지연에 미친 영향이 41일로 공기지연 사유에 타당성이 있으므로 잔여공사 시행을 위한 공기 추가 확보가 필요한 것으로 판단됨.

○ 준공기한 연기 시행

- 당 초 : (총차) 2016.4.12. ~ 2017.10.11.

(2차) 2017.8.1. ~ 2017.10.11.

- 변 경 : (총차) 2016.4.12. ~ 2017.11.21.

(2차) 2016.8.1. ~ 2017.11.21.

○ 책임소재 : 발주처 귀책사유

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치의견

○ 상기 보고 내용과 같이, 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)의 계약자로부터 요청된 준공기한 연기원에 대하여 감리단의 의견을 검토한 결과,

○ 객관적인 사료와 현장 여건에 의거 준공기한 41일 연기사유가 타당한 것으로 판단되므로 상기와 같이 계약기간 연장하여 예산집행 및 공정관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 향후 추진일정

○ 2017. 09월 : 성능개선부 슬래브 및 거더 철거 완료

○ 2017. 10월 : 상부 빔 거치 및 슬래브 타설/양생

○ 2017. 11월 : 교면포장 (공사완료)

붙임 : 준공연기원 검토보고(감리단) 1부.  끝.