문서번호	급수운영과-17469
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
김병주		박희철	09/22 차장운
협 조
	시설관리과장			박은선
	주무관			김일구

2017년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획
2017년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획 보고

2017. 9.

강남수도사업소

2017년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획

수도계량기보호통 전수조사 결과 보온재 및 뚜껑이 파손, 망실 되어 동파의 우려가 있는 보호통을 정비하여 동파를 최소화하기 위한 정비계획을 보고드림

1		사 업 현 황

□ 추진근거

❍ 행정2부시장 방침 제77호 (2013. 03.13)

“ 겨울철 대비 동파·동결 예방대책 추진”

❍ 급수설비과-1315호 (2017.2.14.)

“2017년 수도계량기보호통 보온재 및 뚜껑 정비계획 보고”

□ 총 사업개요

❍ 전수조사 : 2013. 3월 ~ 5월

❍ 사업기간 : 2013 ~ 2019년

❍ 사업목표 : 136,000개

	개
	선

❍ 사 업 비 : 51억원

2		2017년 추진계획

□ 추진기간 : 2017. 10월 ~ 11월

□ 보온재 정비

❍ 목표량 : 1,780개 (15mm 1,486개, 20mm 144개, 25~50mm 150개)

❍ 사업비 : 56백만원

□ 보호통 뚜껑 정비(‘16년부터 별도 예산 확보하여 시행)

❍ 목 표 량 : 681개 (15mm 556개, 20mm 125개)

❍ 사 업 비 : 31.9백만원

3		2016년 추진실적

□ 보온재 및 뚜껑 정비

구 분	목 표	실 적	달성율(%)
보온재	3,360	3,242	96.5
뚜 껑	681	705	103.5

4		세부 추진계획

□ 구별 정비계획

구분	계		보온재교체		뚜껑교체		비고
	목표 (개)	예산 (백만원)	목표 (개)	예산 (백만원)	목표 (개)	예산 (백만원)
계	2,461	87.9	1,780	56	681	31.9
강남구	1,231	44	890	28	341	16
서초구	1,230	43.9	890	28	340	15.9

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비)

❍ 보호통 뚜껑, 보온재 정비대상 중 동파 우려가 많은 15㎜/20㎜ 우선 정비

❍ 현장민원과에서 통보한 최근 5년간 3번 반복 동파대상 집중정비

❍ 동절기 이전 정비 완료하여 동결/동파 예방 : 11월까지 완료

5		행 정 사 항

□ 사업소와 계약된 급수공사 계약업체에 작업지시 후 정산시행

□ 보온재는 본부 인증제품을 관급으로 구매하여 시공

단, 긴급한 상황 발생으로 자재수급이 어려울 경우는 사급으로 대체

□ 보호통뚜껑은 자재사업소 관급자재 사용

첨부  1. 보호통보온재 및 뚜껑 정비대상 1부.

2. 집중관리 동파계량기 현황 1부.  끝.