투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 회신(공사기간 연장 승인-월드컵대교 북단 연결도로))

1.업무지시현장 :  월드컵대교 북단 연결도로 전기공사 주식회사포스코엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2017-09-22 17:09:12

3.지 시 내 용

가. 월드컵(감리) 2017-517호(2017.09.14.)와 관련입니다.

나. “월드컵대교 북단 연결도로 전기공사” 와 관련 실정보고한 공사기간 연장 승인 요청에 대하여 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 승인하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행 등 감리업무 처리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

다. 승인내용 : 공사기간 연장 승인

- 당초 2017년 9월 30일에서 2017년 11월 30일까지 연기.  끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							호정오			건축설비과장					전결 09/22 김은덕
협조자
시행			설비부-16396									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8628						/전송			02-3708-8659					/													/	대시민공개